문서번호	설비부-4563
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
김도형		여인웅	03/28 권오식
협조

『서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수 기계설비공사』

관급자재 추가 구매 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수 기계설비공사』

관급자재 추가 구매 보고

혁신파크 내 진행중인 ‘중소규모 건축물 개보수 기계설비공사’ 현장여건 변경으로 관급자재 추가 설치가 필요하여 검토하고 보고 드림

공사 개요

○ 공 사 명 : 서울혁신파크 중소규모건축물 개보수 기계설비공사

○ 공사규모 : 5개동(5,7,16,19,21동) 리모델링 기계공사

○ 공사기간 : 2015.12.27. ∼ 2016.04.27

○ 계약금액 : 255,466천원

○ 시 공 사 : ㈜선진콘트롤 엔 엑세스 대표 박종선, 김원식

○ 공 정 율 : 80%(2016.3.25.현재)

관련근거

○ 사회혁신담당관-2007(‘16.2.22) : 중소규모건축물 개보수공사 변경시행 요청

○ 사회혁신담당관-3304(‘16.3.21) : 서울혁신파크 16동 및 21동 개별 가스계량기 설치 요청

관급자재 추가 현황

○ 품명 및 수량 : EHP 실내기 × 2대, 가스량 적산분배시스템 × 1식

○ 구매 사유

∙ 21동 평면계획 변경으로 사무공간 2개소 추가(운영자 요청사항)

∙ GHP 사용에 따른 각 실별 가스사용량 계측기 설치(혁신센터 요청사항)

○ 조치 계획

∙ 신설 사무공간에 EHP 실내기 설치하여 냉·난방 기능 확보

∙ 가스량 적산분배시스템 구축하여 실별 가스사용량 구분.

구매 계획

○ 소요예산 : 9,479,090원(조달수수료 포함)

○ 구매방법 : 조달구매(다수공급자)

○ 납품기한 : 계약일로부터 1개월

○ 예산 과목 : 사회혁신담당관, 사회문제 해결을 위한 사회혁신의제

발굴시행, 사회혁신기반조성 및 성과확산, 서울혁신파크

조성사업, 시설비

향후 계획

○ ‘16. 03. 28 : 관급자재 구매 발주

○ ‘16. 04. 20 : 설치 완료

○ ‘16. 04. 27 : 서울혁신파크 중소규모건축물 개보수 기계설비공사 준공.

붙임 : 조달견적서 1부.   끝.