문서번호	설비부-4566
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
지장환		여인웅	03/28 권오식
협 조

『서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 통신공사 』

설계변경(정산)검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 통신공사」

설계변경(정산) 검토 보고

『서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 통신공사』와 관련하여  운영부서 요구사항에 대하여 설계변경(정산)을 시행하고자 아래와 같이 검토 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 통신공사

공사위치 : 은평구 통일로 684(서울혁신파크 8동)

공사규모 : 서울혁신파크8동(1,2,4층) 리모델링(통신)

공사기간 : 2015.11.01. ~ 2016.03.31.(2차 2016.02.05.~2016.03.31.)

계약금액 : 96,646,000원(2차 87,980,145원)

시 공 사 : 삼정정보통신 대표 이순봉

Ⅱ		설계변경 사유 및 내용

설계변경 근거

○ 서북(은평)50+캠퍼스 리모델링 변경사항 요청 : 인생이모작지원과-2728(2016.03.21.)

○ 운영부서 합동점검(2016.03.24.)결과 보고 : 설비부-4485(2016.03.25.)

설계변경 주요내용

○ 설계변경내용(운영부서 요구사항 반영)

구 분	당 초	변 경	비 고
1층,2층,4층 랜선 추가 (사무실 및 교육실 인터넷, IPTV, AP용)	-	통신 수구 및 배관배선반영
1층 교육실 #1,2 전자교탁을 2층 교육실 #1,2로 이동요청에 따른 통신배관배선공사 추가	-	통신 수구 및 배관배선반영

○ 설계변경 세부내용

구 분	품 명	당초	변경	증·감액(원)	비고
통합배선설비공사	합성수지제 가요전선관 16mm	61m	306m	증 1,434,230
	스위치 박스 54mm	28개	37개	증 258,633
	UTP케이블 cat.5E 4P	2,275m	3,525m	증 4,046,250
	플레이트	27개	36개	증 2,727
	모듈라잭 매입용 cat.5E 2구	27개	36개	증 112,680
AV설비공사	합성수지제 가용전선관 16mm∼28mm	264m	347m	증 668,552
	콘크리트박스 8각 54mm	19개	23개	증 70,812
	제어케이블 F-CVV 3C 2.5mm2	301m	364m	증 357,840
	스피커케이블	64m	149m	증 536,435
	HDMI 케이블	50m	74m	증 168,479
직접공사비 합계				증 7,656,638
제경비				감 189,673	보험료정산

○ 공사비(정산) 변경내용

(단위 : 원)

구분	당초금액	변경금액	증·감금액	비고
총차	96,646,000	103,697,000	증 7,051,000
1	8,665,855	8,249,890	감 415,965	‘16.02.24 준공(보험료 정산)
2	87,980,145	95,447,110	증 7,466,965

Ⅲ		보고자 조치의견

시공사에서 제출한 운영부서 요구사항 반영 및 보험료 정산에 관한 설계변경(정산)사항을 검토한 결과 적합하여 건설총괄부에 설계변경을 의뢰하고자 함.

붙임  1. 설계변경도서 및 합의서 각 1부. 끝.