	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	강동소방서 고덕119안전센터 차고문 조달구매 계약기간 변경

1. 관련근거

가. 강동 소방행정과-9391(2015.8.3.)호 「강동소방서 고덕119안전센터 재건축 공사 시행 계획」

나. 강동 소방행정과-1681(2016.2.12.)호 「고덕119안전센터 차고문 설치 관련 심희회 개최 계획」

다. 강동 소방행정과-1784(2016.2.15.)호 「고덕119안전센터 차고문 설치관련 심의회 개최 결과 보고」

라. 강동 소방행정과-1868(2016.2.16.)호 「강동소방서 고덕119안전센터 차고문 조달구매 발주 보고」

2. 우리 서 고덕119안전센터 재건축 공사의 공사 지연으로 차고문(오버헤드도어) 설치가 계약 기한내에 설치가 어려워 다음과 같이 연장하고자 합니다.

가. 건    명 : 강동소방서 고덕119안전센터 차고문 설치 계약기간 연장

나. 변경내용 : 2016. 3. 30. → 2016. 4. 29.(30일 연장).  끝.

담당자	김기범		장비회계팀장	이순호		소방행정과장	손문종		소방서장	03/28 이영우
협조자
시행	소방행정과-3688	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02)473-1233	/전송	02)483-1190	/	kkb5630@seoul.go.kr	/	부분공개(7)