문서번호	시설과-2145
결재일자	2016.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경팀장	시설과장
김기수		남상국	03/28 김한준
협조
	주무관		전정아

『남산공원 녹지복원사업』 설계변경 검토보고

2016. 3.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『남산공원 녹지복원사업』

설계변경 검토보고

『남산공원 녹지복원사업』 시행과 관련하여 현장여건 변경사항을 반영하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

공사현황

공 사 명 : 남산공원 녹지복원사업

도급금액 : 금258,530,000원

공사기간 : 2015. 12. 7. ~ 2016. 4. 6. (공정율 90%)

공사내용

- 식재공사

· 교목류 : 신갈, 산사나무 등 3종 30주

· 관목류 : 진달래, 생강나무 등 8종 2,595주

· 초화류 : 돌단풍, 바위취, 꼬리조팝 등 8종 2,830본

- 시설물정비 : 폐쇄약수터 3개소 및 저류조 3개소 정비, 휴게쉼터 1개소 정비

도 급 자 : 임원개발주식회사 대표 이대성

설계변경 주요내용

구 분	주 요 변 경 내 용	비 고
수목식재 및 시설물 정비	▶ 수목식재 물량 조정 및 휴식공간 조성 반영 - 유스호스텔 상부 및 후암저수조 철거지역 식재물량 변경 ·교목 : 신갈나무 등 3종 30주 → 0주(감30주) ·관목 : 진달래등 7종 2,595주 → 825주(감1,770주) → 추가수목은 서울시 양묘장 수목을 지원받아 자체식재 추진 - 유스호스텔 상부 휴식공간 조성 ·파고라 1개소 설치 → 남산경관을 바라보며 쉴 수 있는 휴식공간 설치

※ 3초소앞 휴게쉼터 입구 저촉가로등(1개)은 기전팀 지원(연간단가)을

받아 이동조치 완료

총공사비 (변동없음)

(단위:원)

구 분		도 급 비 (원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
합 계		281,606,200	281,606,200	0
도급비	공 급 가 액	235,027,273	234,137,637	감889,636
	부가가치세	23,502,727	23,413,763	감88,964
	계	258,530,000	257,551,400	감978,600
관급자재비		23,076,200	24,054,800	증978,600

검토의견

설계변경 주요내용은 유스호스텔 상부 저수조 철거지역 수목식재 물량변경 사항을 반영하고 시민들을 위한 휴식공간이 필요함에 따라 현장여건에 맞게 물량조정하여 공사추진에 만전을 다하고자 하며,

추가 식재가 필요한 사항은 서울시 양묘장에서 수목을 지원받아 자체식재 하고자 함.

이용 시민들의 요구사항을 최대한 반영하여 안전하게 이용할 수    있도록 정비하고자 함.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.