투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	변경계약(공사) 체결 안내-중랑천 상류 차집관거 성능개선공사(1차)

시설보수과-1129(2016.03.25)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약을 체결되었음을 알리오니, 감독업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

1. 계약건명 : 중랑천 상류 차집관거 성능개선공사(1차)

2. 계약금액 : 금387,877,000원(금삼억팔천칠백팔십칠만칠천원)

3. 계 약 일 : 2015년  06월 19일

4. 변경내역

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
공사기한	2016.03.31	2016.06.25	증) 86일
금액변경	금387,877,000원	금387,877,000원	없음

5. 변경사유 : 유관공사 지연등으로 인한 절대공기 부족으로 공사기간 연장

6. 계약업체 : 성일건설(주) (대표:황윤성)

***********-3131)

붙임 : 공사변경계약체결 통보서 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	정상진		관리과장	한병연		중랑물재생센터소장	03/29 이성재
협조자
시행	관리과-3995	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	jungsj0318@seoul.go.kr	/	부분공개(6)