투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	‘돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사’계약 변경(총차, 3차) 의뢰

우리 본부에서 시행 중인‘돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사’와 관련, 설계변경 사항이 있어 아래와 같이 계약 변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공   사   명  : 돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사(총차 및 3차)

나. 계   약   자  : ㈜일성이엔지 외 1

다. 계약 변경 내용

구 분	도급비(원)			비 고
	당 초	변 경	증․감
총차	780,352,000	813,460,000	증) 33,108,000
1차	100,000,000	98,464,000	감 1,536,000	기 준공
2차	100,000,000	98,118,000	감 1,882,000	기 준공
3차(금차)	580,272,000	616,878,000	증36,606,000	금차 준공액
잔여금액	80,000

※ 공사 기간 변경 없음

라. 예산과목 : 문화정책과, 문화도시 서울구현, 문화기반시설조성,
돈화문로 전통문화시설 건립, 시설비 및 부대비(시설비)

따로 붙임 1) 설계변경 검토 보고서 1부.

2) 감리단 설계변경 요청 검토 보고서 1부.

3) 시공사 설계변경 요청서(별도송부) 1부.

4) 설계변경 내역서(총차, 3차, 합의각서 포팜) 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박경철		시책사업과장	임현근		설비부장	전결 03/29 권오식
협조자	계약1팀장	김점선
시행	설비부-4769	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	대시민공개