문서번호	하천관리과-4571
결재일자	2016.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		치수설비팀장	하천관리과장
김재웅		김중영	03/30 이진용
협조
	치수시설과장		김흥근

잠원2 자연방류관로 설치 공정회의 결과 보고

2016. 03

물순환안전국

(하천관리과)

잠원2 자연방류관로 설치 공정회의 결과 보고

‘16. 12월 준공 예정인 「잠원2 자연방류관로 설치공사」관련, 금년도

수방업무 활용을 위한 공사 추진 및 운영주체 등에 대하여 회의를 개최   하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		회의내용

○ 일 시 : ‘16. 3. 28(월) 14:00 ~ 15:30

○ 장 소 : 8층 하천관리과 회의실

○ 참석자

- 도시기반시설본부 : 치수시설과장, 업무담당(방재시설부, 설비부)

- 강남구청 : 치수팀장, 업무담당

- 하천관리과 : 치수설비팀장, 업무담당

○ 안 건 : 공사 추진 및 운영주체 결정 등

Ⅱ		사업개요

○ 위  치 : 서울시 강남구 압구정동 422번지 신사공원 일대

○ 규  모 : 자연방류관로 설치(2□3×2.5m, L=640m), 수문 2개소

○ 사업비 : 16,500백만원(도기본 시행)

○ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2016. 12.

※ 금년 우기철 자연방류관로 임시 활용 계획임.

Ⅲ		공사 추진현황

○  2013. 01 : 공사 착공

○  2013. 02 ~ 2013. 11 : 행정행위(도시계획시설결정, 점용허가 등)

○  2013. 12 : 신사공원 수목제거 및 가설방음벽 설치

○  2014. 02 : 펌프장 반대민원으로 공사 중단

○  2014. 03~2015.06 : 정책간담회, 시장 면담, 대안검토 및 수립

○ 2015. 07~10 : 주민설명회 및 설계 보완, 공사 재개

○ 2016. 3월(공정율 62%)

- 올림픽대로 202m 추진 완료

- 관 로 : 제외지 155m중 137m 부설, 제내지 392m중 87m 부설

Ⅳ		회의결과 보고

□ 공정 추진(금년 수방기간 활용)

○ ‘16. 4. 30.까지 수문 구조물 및 방류관로 완료 후 5. 20.까지 수문       및 자동제어설비 강남구청 상황실에 설치 완료.

○ 수문 및 기타 설비에 대한 시운전은 도기본․강남구청 합동으로 ‘16.       5.21.~5.30.일까지 시행한다.

○ 가동보 설치는 수방기간 종료 후 착수하여 ‘16.11월까지 완료한다.

○ 수문 및 부대설비(수위계, CCTV 등) 시스템 구성은 금주 중 세부설계       완료하여 강남구청 치수과와 사전협의 후 즉시 발주한다.

□ 운영주체 결정

○ 운영주체는 도기본과 강남구청의 입장이 서로 상이한 바, 추가 검토 후       다시 협의하여 결정.

□ 강남구청 요구사항

○ 한강 방류 토출구에 플랩밸브 설치 등 안전대책 마련 필요.

○ 수문설비의 효율적인 유지관리를 위하여 CCTV, 수위계 등 추가 설치.

□ 기타사항

○ 가동보 기립상태에서 수문 폐쇄가 되지 않도록 사전경보시스템 설치        등 시스템 보완(설비부)

○ 운영매뉴얼은 세부 시스템 보완 후 향후 추가 검토.

□ 하천관리과 의견

○ 수방기간 및 시운전 일정 등 고려시 잔여 일정이 촉박한 바, 도기본에서       보다 철저한 공정관리 시행.

○ 수문 운영과 관련된 사항은 도기본과 강남구에서 긴밀히 협의하여 금년       수방 활용에 차질 없도록 조치.

Ⅴ		향후 계획

○ 운영주체는 도기본과 강남구청 추가 검토 후, 다시 협의하여 결정.

붙임 : 1) 회의사진 및 회의록 각 1부.  끝.