보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이상욱	이경희	03/30 이자화

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여 급수공사 업무수행 중 급수공사 연기신청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

▢ 현  황

작업지시 번호	위 치	작업승인 공문	비 고
신설-274	조원동 567-1	급수운영과-6011(2016.03.22.)

▢ 보고 내용

○ 상기 공사건에 대하여 급수공사 작업지시를 하였으나, 내부공사가 지연되어 (공사자재 적치등) 작업이 어려움에 따라 공사연기가 필요한 실정임

- 연기기간 약 18일간

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 계획

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
신설-274	2016.03.25.~04.04.	2016.03.25.~04.22.

붙임 : 상수도공사 연기원 1부.(별도첨부)  끝.