문서번호	토목부-6176
결재일자	2016.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	03/30 김영수

남부순환로 개봉역앞 구조개선공사 일부 포장도로 하자관련 외부전문가 자문 결과 및 후속 추진

2016. 3.

도시기반시설본부

(토 목 부)

남부순환로 개봉역앞 구조개선공사 일부 포장도로 하자관련

외부전문가 자문 결과 및 후속 추진

2015. 12.월 준공된 ‘남부순환로 개봉역앞 구조개선공사’ 의 포장도로 일부가 포트홀, 균열(종방향, 거북등), 골재분리 등 다수 발견되어 시설물 인수기관에서 전면 재포장을 요구함에 따라, 외부전문가 자문 결과 및 후속업무 추진계획을 보고드림.

▢ 자문개요

○ 일    시 : 2016. 3.29.(화) 15:00 ~ 16:30

○ 장    소 : 남부순환로 개봉역앞 주변 포장도로

○ 참 석 자

- 외  부 : 서울시 품질시험연구소 포장도로연구관 김태우,

㈜콘택이엔지 공학박사 박성기

- 시공사 : ㈜KSC건설 정종열, 한국투수개발(주) 신홍선(포장업체)

- 내   부: 동명기술공단 비상주감리 정수기, 공사관리관(이한규)

○ 안    건 : 남부순환로 포장도로 일부 하자구간 점검 및 조치방안

▢ 자문결과(주요의견)

○ 덧씌우기 포장된 저소음배수성 포장에 대한 육안조사결과 골재분리, 피로균열, 종방향 균열, 포트홀 등 다수 발생되고 있음.

○ 상부 균열은 우수유입에 의한 원인과 하부 지반지지력 부족, AP함량 부족에 따른 배합설계 잘못 등 복합적으로 작용한 것으로 판단됨.

○ 현재 포장상태는 공용수명 대비 노후화가 크게 진행된 것으로 보여지며, 이에 대한 원인조사가 선행되어야 할 것으로 판단됨으로 FWD(노상 지지력평가 시험) 다짐도, 공극률 등 시험을 통하여 원인을 명확히 파악 한후 수분 침투 등에 대한 저항성이 큰 포장으로 재포장 하는 것을 검토할 필요가 있음.

▢ 후속 추진 계획

○ 현재의 아스팔트포장도로에 대하여 AP함량시험, 다짐도시험, 밀도시험, 기존 도로의 노반의 지지력 시험 등을 서울시품질시험소에 의뢰(시험비는 시공사 부담)

○ 시험결과를 토대로 원인분석 등을 통하여 하자보수 범위(구간, 절삭 깊이, 포장두께) 결정

붙 임 : 1. 자문 검토의견서 각 1부.

2. 점검사진 1부.   끝.