투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	『서울둘레길 안내센터 리모델링 전기공사』설계변경 요청

1. 시설과-2189(2016. 3.29.)호와 관련입니다.

2.『서울둘레길 안내센터 리모델링 전기공사』시행과 관련하여 다음과 같이 설계변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울둘레길 안내센터 리모델링 전기공사

나. 공사기간 : 2015. 12. 28.~ ‘16. 04. 05.

다. 도 급 자 : 한양전기건설공사(대표 : 이영식)

라. 설계변경내용 : 건축분야 설계변경에 따른 전기공사 공종별                                     시공물량 변경 및 보험료 등 기타 경비 정산

마. 설계변경금액                                     (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
공급가액	20,053,137	23,090,909
부가가치세	2,005,313	2,309,091
총 공사비	22,058,450	25,400,000	증3,341,550

바. 예산과목

푸른도시국 자연생태과, 생태계 복원 및 보전과 야생동식물보호, 생태계보전사업, 서울둘레길 유지관리, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경내역1부. 끝.

	시설과장
주무관	오영근		기전팀장	강민수		시설과장	03/30 김한준
협조자
시행	시설과-2198	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 중부공원녹지사업소 시설과	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	3783-5972	/전송	3783-5969	/	fiftykun@seoul.go.kr	/	대시민공개