문서번호	도로보수과-1710
결재일자	2016.3.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
한수영		김준섭	03/30 이덕기
협조

2016년 도로파손 긴급복구공사 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

남부도로사업소 도로보수과

2016년 긴급복구공사 정비계획

우리사업소 관내 시도상 안전사각지대인 도로접속부(시‧구도로접속부) 포장상태가 불량한 포장도로와 포장도로 파손정도가 심한구간(망상균열, 소성변형등), 민원이 발생된 부분에 대하여 우기전 집중정비하여 안전사고를 사전에 방지하고자 함.

공사개요

공 사 명 : 2016년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)

공사개요 : 절삭후 덧씌우기 및 소파복구

공사기간 : 2016. 2. 22 ~ 2016. 12. 20

총공사비 : 1,097,073천원

(도급비:666,853천원, 관급비:228,934천원, 이전비:201,286천원)

계 약 자 : 성원특수건설 대표  이영자

그간 공사추진 현황

2016. 1. 25. : 공사발주

2016. 2. 22. : 공사 계약 및 착수

2016. 3. 25. : 작업물량 조사

보고사항

안전사각지대(도로접속부) 포장 불량구간조사

- 조사대상 : 남부순환로, 효령로, 상도로

- 조사결과

정비노선	정비대상	정비내용	비 고
계	63개소	아스콘포장보수 A=23.85 a
남부순환로	관악농협앞 외38개소	절삭후 포장(t=5cm) : 15.33a	아스콘(#78)
효 령 로	메트로약국앞 외22개소	절삭후 포장(t=5cm) : 7.94a	아스콘(#78)
상 도 로	넷스펫동물병원앞	절삭후 포장(t=5cm) : 0.58a	아스콘(#78)

도로포장 상태불량(균열, 침하, 소성변형) 및 민원발생 구간조사

- 조사대상 : 관내 전구간

- 조사결과

정비노선	정비대상	정비내용	비 고
계	33개소	아스콘포장보수 A=393.37 a
우면로외10 (포장불량구간)	대신증권앞 외 29개소	절삭후 포장(t=5cm) : 342.97a 절삭후 포장(t=12.5cm) : 25a	아스콘(#67)
시흥대로외1 (민원발생구간)	말미사거리내 외 2개소	절삭후 포장(t=5cm) : 25.4a	아스콘(#67)

포장상태 현황(사진)

도로접속부	포장불량구간	민원발생구간
남부순환로(관악농협앞)	시흥대로(문성초교앞)	디지털로(수출의다리앞)

조치계획

안전사각지대(도로접속부) 부분은 소규모 포장으로 아스콘(#78) 사용 절삭후(t=5cm) 포장 시행.

포장불량구간 및 민원발생구간은 아스콘(#67)사용 절삭후(t=5cm)포장 하고, 다만 소성변형이 심한 구간은 절삭후(t=12.5cm)포장 시행.

향후계획

2016.03.30. : 1차 작업 지시

2016.04.01.~5.15. : 포장공사 준비 및 시행

붙 임 : 공사 물량 1부. 끝.