문서번호	설비부-12147
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		임현근	전결 10/02 박기형
협조
	주무관		유영선

‘돈화문 국악예술당 건립공사(기계,전기,통신)’

사업비 집행 방안 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

도시기반시설본부

설비부

돈화문 국악예술당 건립공사(기계,전기,통신)

사업비 집행방안 검토보고

‘돈화문 국악예술당 건립 공사’와 관련, ‘14년 사고이월 예산 및 당해 예산 등을 효율적으로 집행하여 예산 불용을 방지하고자 검토하고 보고드림

1		사 업 개 요

○ 위     치 : 서울시 종로구 와룡동 12-2외 2필지

○ 사업규모 : 지상1층/지하3층, 연면적 1,778㎡

○ 공사 현황	(단위: 천 원)

구 분		돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사	돈화문 국악예술당 건립 전기공사	돈화문 국악예술당 건립 통신공사	비 고
공사 기한	총차	2013. 12. 23.~ 2015. 10. 16.			‘16년 3월 말로 준공기한 연기 예정
	1차	2013. 12. 23.~ 2015. 10. 16.
	2차	2014. 12. 15.~ 2015. 10. 16.
도급비	총차	706,894	444,312	306,739
	1차	100,000	100,000	50,000
	2차	100,000	100,000	39,620
관 급 비		401,510	265,525	144,185
계약업체		㈜일성이엔지 외 1개사	삼언전공(주)	㈜에스앤티에스
감리업체		㈜영화키스톤건축사사무소

2		사업비 집행 방안

○ 2014년 사고이월 예산 원인행위 변경 내용	(단위: 원)

계 약 건 명		당 초	변 경	비 고
도급	돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사(1차)	30,000,000	61,528,547 (증 31,528,547)
	돈화문 국악예술당 건립 기계 설비공사(2차)	100,000,000	100,000,000 (변경 없음)
	돈화문 국악예술당 건립 기계 설비공사(3차)	0	46,898,253 (증 46,898,253)

계 약 건 명		당 초	변 경	비 고
도급	돈화문 국악예술당 건립 전기공사(1차)	30,000,000	100,000,000 (증 70,000,000)
	돈화문 국악예술당 건립 전기공사(2차)	100,000,000	100,000,000 (변경 없음)
	돈화문 국악예술당 건립 통신공사(1차)	15,000,000	50,000,000 (증 35,000,000)
	돈화문 국악예술당 건립 통신공사(2차)	39,611,540	39,620,000 (증 8,460)
	한전표준공사비	0	54,023,200 (증54,023,200)
관급	지열히트펌프시스템 구매설치	117,472,070	41,920,000 (감 75,552,070)	▸‘15년 및‘16년 명시 이월예산으로 재추산
	자동제어설비 구매설치	153,412,080	76,010,000 (감 77,402,080)
	수배전반 구매	57,074,320	0 (감 57,074,320)
	디젤발전기 구매	27,429,990	0 (감 27,429,990)
계		670,000,000	670,000,000

○ 2015년 당해 예산 원인행위 변경 내용	(단위: 원)

계 약 건 명		당 초	변 경	비 고 (천원)
도급	돈화문 국악예술당 건립 통신공사(2차)	8,460	0	▸선행 공정(건축) 지연 등으로 금년 지출이 불가하여 16년 명시 이월 조치
관급	공기순환기 구매	16,128,320	0
	공기조화기 구매	22,811,420	0
	냉난방기 구매	20,974,950	0
	무대기계장치 구매설치	70,711,550	0
	전력 및 조명제어설비	58,589,570	0
	LED조명등기구 구매	33,233,720	0
	무대조명장치 구매	89,197,560	0
	음향설비 구매	110,182,200	0
	CCTV설비 구매	34,003,500	0
원인 행위 미필		23,454,750	0
계		479,296,000	0

○ 2014년 사고이월 예산 집행(예정) 현황                          (단위: 원)

구 분	원인행위금액	지 출 액	12월말까지 지출 예상액	불용 예상액	비 고
시 설 비	670,000,000	0	670,000,000	0

○ 예산 배정(예정) 현황                                        (단위: 천 원)

구 분	‘15년 명시이월	‘16년 명시이월	비 고
시 설 비	1,428,598	479,296	1,907,894

3		보고자 의견

○ 사업의 원활한 추진 및 예산의 효율적 지출을 위해 불용이 예상되는 2014년 사고이월 예산에 대하여는 원인 행위를 변경하여 불용을 방지토록 조치하고,

○ 금년 지출이 불가하여 감액 조치한 사업(당해 예산을 포함) 및 원인 행위가 안된 3차수 공사 등에 대하여는 기 배정된 2015년 명시이월 예산 및 2016년 명시이월 예산을 재배정 받아 원인 행위 변경 등의 조치를 시행하여 예산 집행에 만전을 기하고자 함.  끝.