문서번호	기전과-2174
결재일자	2016.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
윤석주		양영민	03/03 배광환
협조

남산3호터널 추진사업  발주계획

2016.  3.

서부도로사업소

(기전과)

남산3호터널 추진사업 발주계획

터널 전력 감시제어설비가 장기사용으로 인한 노후로 기능저하 및 잦은 고장이 발생됨에 따라 현대화 설비로 개량하여 시스템 안정화 및 화재 등 사고시 신속한 대처로 시민들의 생명과 재산을 보호코자 함.

1		사업근거

□ 법령상 근거

○ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침(2009.8 국토교통부)

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례(서울특별시조례 제5784호)

○ 2016년 도로기전시설물 유지관리계획(기전과-13855, 2015.12.28.)

2		사업개요

□ 사업명 : 남산3호터널 감시제어시스템(RTU반) 제작구매 설치

○ 위    치 : 남산3호터널 중앙제어실

○ 사업기간 : 2016. 03. ~ 2016. 8.

○ 소요예산 : 109,000천원

□ 사업내용

○ 감시제어반(W1000×H2350×D1000) 1면

○ 철거설치 및 부대공사 1식

□ 발주방법

○ 지명경쟁입찰

-「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조 제10호」에    의거 지명경쟁입찰에 의함

○ 지명업체선정

-「중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한법률 제9조제1항」에 따른    직접생산확인증명서를 소지한 업체로서「지방자치단체를 당사자로    하는 계약에 관한 법률시행령 제23조(지명입찰대상자의 지명)」에 의한 우수

업체 5개사 이상 조합추천을 받아 선정

○ 계약방법: 조달계약

○ 예산과목: 도로시설관리, 기전시설물관리(도시개발특별회계), 터널 및

지하차도전력설비개량사업, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 향후계획

○ 2016. 3. 04. ~ 2016. 4. 10.: 조달발주 및 계약

○ 2016. 4. 15. ~ 2016. 7. 10.: 제작설치 완료

○ 2016. 7. 11. ~ 2016. 8. 30.: 시운전 및 준공

□ 사업효과

○ 현대화 시스템 구축으로 안정된 전력감시제어 구축

○ 긴급 상황 발생시 즉각적인 대처 가능

첨  부: 1. 우수업체 추천의뢰서 1부.

2. 지명입찰 추천서(조합) 1부.

3. 지명경쟁 사유서 1부.

4. 설계도서 1부.끝.