문서번호	정수시설과-898
결재일자	2016.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김향석		김긍채	03/31 박기석
협조

설계변경 및 심의위원회 개최 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 및 심의위원회 개최 계획

우리센터에서 시행한 “전기설비 유지보수공사 연간단가”사업의 준공기한이 도래됨에 따라 설계변경 및 이에 대한 심의위원회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.

□ 설계변경 계획

○ 공사개요

- 공 사 명 : 전기설비 유지보수공사(연간단가)

- 계약기간 : 2015.05.06 ~ 2016.03.31

- 계액금액 : 금185,337,130원

- 계 약 자 : 케이에스오전기(주)  대표  박 종 숙

○ 설계변경

- 변경사유 : 제5,6,7,8,9차 작업지시에 의한 물량변경 발생

- 변경내용

․금액변경

구 분		당 초	변 경	증․감
도급비	공 사 원 가	168,488,300	143,103,545	25,384,755
	부가가치세	16,848,830	14,310,355	- 2,538,475
	계	185,337,130	157,413,900	- 27,923,230

․시공물량(상세내역 변경설계내역서 참조)

구 분	공 종	금 액(원)
물량감소	접지봉(φ16×1800)설치 등 248건	(감)29,313,000
물량증가	HFIX 전선 4㎟ 포설 등 52건	(증)7,739,770
제경비정산		(감)6,350,000
계		(감)27,923,230

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 심의위원 구성

- 위 원 장 : 정수시설과장

- 위    원 : 정수시설과 시설6급 김동우, 공업6급 송여배,

공업7급 김영민

- 간    사 : 정수시설과 공업6급 송종봉

○ 심의위원회 개최

- 일    시 : 2016년 3월 31일(수) 09:30~10:00

- 장    소 : 정수시설과 회의실

- 안    건 :『전기설비 유지보수공사 연간단가』설계변경 심의

- 개최사유 : 신규공종 발생과 물량증감에 따른 설계변경 및 정산

□ 향후계획

○ 위와 같이 공사시행 중 발생한 시공물량 증․감 및 제경비 정산에 따른 변경사항에 대하여 설계변경 계약 후 준공처리 하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 심의결과서(양식) 1부. 끝.