문서번호	도시철도사업부-3070
결재일자	2016.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신교통1과장	도시철도사업부장
최영준		호경수	03/31 권영찬
협조	공정관리과장		박용우
	신교통2과장		이근봉

신림선 설계도면 검토 계획

2016. 3

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

신림선 설계도면 검토 계획

신림선 착공(‘16.4월말)을 앞두고 각 공구별 공사관리관이 설계도면을 사전 검토하여 실시계획 승인 전에 우리부 의견이 설계에 반영될 수 있도록, 신림선 설계 도면 검토보고 회의를 개최하고자 함.

Ⅰ		사 업 개 요

□ 구    간 : 여의도(샛강역) ~ 서울대 입구

□ 규    모 : 연장 7.8km, 정거장 11개소, 차량기지 1개소

□ 사 업 비 : 5,606억원 (‘07. 7.1기준, 보상비 제외)

□ 시공 공구조정(안)

구 분	1공구	2공구	3공구
공구경계	0k031 ~ 2k318	2k318 ~ 5k320	5k320 ~ 7k791
시공사	두산	대림(주간사)	한화

□ 노 선 도

Ⅱ		검토회의 개요

□ 일    시 : ‘16. 4. 5(화) 13:30 ~ 15:30

□ 장    소 : 도시기반시설본부 도시철도사업부 회의실

※ 총 3회에 걸쳐 동일 장소, 시간에 검토 보고 개최 예정 : 4.7(목), 4.12(화)

□ 참석대상 : 도시철도사업부장, 담당과장 및 각 공구 공사관리관

□ 주요내용

○ 설계누락, 설계서간 불일치 등 예상되는 리스크에 대한 검토

○ 신림선 경전철 민간투자사업 진행상황 공유

○ 기타 원활한 사업 진행을 위한 추진방안 등

□ 진행계획(안)

구 분	내 용	시 간
공구별 검토의견	□각 공구별 검토내용 및 추진일정 보고 □기타 문제해결방안 등 모색	13:30~15:00 (90분간)
사업 진행현황	□공사 추진에 대한 제반정보 공유	15:00~15:30

※ 공구별 공사관리관이 설계 검토내용 보고

Ⅲ		향 후 계 획

□ 검토의견 조치 : ‘16. 4.15

○ ‘16. 4. 6 건설기술심의 예정으로 심의 의견 보완시 우리부 의견이 반영될 수 있도록,

○ 최종 검토회의 후 검토의견을 수렴하여 설계부서(도시철도계획부)로 일괄 의견 제출.  끝.