문서번호	설비부-4923
결재일자	2016.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		代이호기	03/31 권오식
협 조

『서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역』

설계변경(총차 3회, 5차 1회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03

도시기반시설본부

(설  비  부)

『서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역』

설계변경(총차 3회, 5차 1회) 검토보고

「서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 」안전사고 예방을 위한 안전감리원 투입기간 연장 및 책임감리 용역기간(5차) 조정에 대한 설계변경 검토 보고 임.

Ⅰ				관련근거

○ 설비부-14694(‘15.11.13) 안전감리원 투입기간 연장 검토 보고.

○ 도화(감리)2016-7893(2016.3.29.)

책임감리용역 총괄 3회 및 5차 1회 변경설계서 제출.

Ⅱ				용역개요

○ 용 역 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역

○ 사업규모 : 분뇨처리시설 4,000톤/일 신설, 기존시설 철거 및 상부공원화

○ 용역기간 : 총차 2012.01.02.~2016.07.31.(5차 ‘15.10.15 ~ ’16.7.11)

○ 계약금액 : 2,650,180천원(5차 500,000천원)

○ 계약업체 : ㈜도화엔지니어링 외 1개사

Ⅲ				설계변경 보고내용

○ 설계변경 내용

구 분		당 초	변 경	증·감
용역 금액	총차	2,650,180천원	2,686,180천원	증)36,370천원
	5차	500,000천원	562,490천원	증)62,490천원
용역 기간	총차	‘12.01.02~’16.07.31	‘12.01.02~’16.07.31	변경없음
	5차	‘15.10.15~’16.07.11	‘15.10.15~’16.07.31	증) 20일

○ 설계변경 주요내용

가. 책임감리용역 총차(36,370천원 증)

- 안전감리원 투입기간 연장

· 사유 : 기전분야 장비설치 및 고소작업에 따른 안전관리.

· 투입기간

당 초	변 경	증·감
‘15.02.03 ~ ’15.11.30	‘15.02.03 ~ ’16.04.30	증) 5개월

· 소요예산 : 증)36,370천원

- 보조감리원 투입기간 및 시기 조정

· 건축공정 시행에 따른 건축감리원 3개월 연장

· 토목 감리원 2개월 단축, 기계 전기 감리원 0.5개월 단축

· 조경 투입시기 조정

· 투입시기 조정에 따른 투입기간 증가 없음.

· 5차(62,490천원 증)

- 안전감리원 추가 투입 : 증)36,370천원.

- 5차분 용역기간 연장 : 증)26,120천원.

2016.07.11. → 2016.07.31.(증 20일)

- 보조감리원(토목, 건축, 전기, 기계 조경) 투입기간 및 시기 조정

- 보조감리원 투입 계획표( ― 당초,    ― 변경)

	인원	‘15년						'16년
		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7
기계	1
토목	1
안전	1
전기	1
건축	1
조경	1

Ⅲ				조치의견

○ 안전감리원 추가 투입 및 공사기간 연장에 따른 감리비 증액, 용역         기간 연장 등 설계변경 내용이 적합하므로,

○ 감리 업무 수행에 차질이 업도록 설계변경을 시행하여 안전 및 품질         관리 등 공사관리에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 1.안전감리원 투입기간 연장 검토보고 1부.

2.관련공문 1부. 끝.