문서번호	시설계획과-3736
결재일자	2016.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기반시설계획팀장	시설계획과장
양승각	홍현탁	03/31 한유석

- 유휴철도부지 도시계획적 관리방안 수립용역 -

준공기한 연장 검토보고

2016. 3.

도시계획국

시설계획과

- 유휴철도부지 도시계획적 관리방안 수립용역 -

준공기한 연장 검토보고

용역수행 과정에서 철도관리 기관(철도공사·공단)과의 추가적인  협의사항이 발생함에 따라 용역 기간을 연장코자 함

▢ 용역개요

❍ 용 역 명 : 유휴철도부지 도시계획적 관리방안 수립용역

❍ 계약업체 : (재)서울연구원

❍ 계약금액 : 금구천육백이십사만원정(￦96,240,000)

❍ 계 약 일 : 2015. 4. 9.

❍ 계약기간 : 2015. 4. 9. ~ 2016. 4. 8.

▢ 계약기간 변경

❍ 변경사항

계약기간	당 초	2015. 4. 9. ~ 2016. 4. 8.
	변 경	2015. 4. 9. ~ 2016. 5. 8.
계약금액	당 초	금 96,240,000원
	변 경	금 96,240,000원(변경없음)

❍ 연기사유

- 해당 용역은 유휴철도부지에 대한 관리방안을 수립코자하는 사항으로서 철도관리 기관(철도공사·공단)과의 긴밀한 협의와 협조가 필요한 사항임.

- 2016. 3.18.(금) 철도공사·공단과 용역결과에 대하여 회의결과, 철도경계 설정기준, 개발방향 등과 관련된 공사·공단의 협의의견에 대하여 추가적인 검토가 요구됨에 따라 추가 검토 및 협의를 위해 과업기간을 연장(1개월)하여 용역수행에 철저를 기하고자 함.

❍ 귀책소재 : 서울특별시

❍ 지체상금 : 미부과

▢ 행정사항

❍ 계약변경 의뢰(재무과) : 계약기간 연장(‘16.5.8. 까지)

붙임 : 합의각서(안)