문서번호	도시철도토목부-3957
결재일자	2016.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		김성호	03/31 김진팔
협 조
	공사지원과장			김창기
	시설전기과장			代조영환
	설비공사과장			황영일
	주무관			김용선

『지하철9호선 3단계 923공구 건설공사』

전면책임감리용역 발주계획 검토 보고(7차)

2016. 03

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『지하철9호선 3단계 923공구 건설공사』

전면책임감리용역 발주계획 검토 보고(7차)

『지하철9호선 3단계 건설공사 전면책임감리용역』과 관련 7차 발주계획에 대해 검토 보고 드림. ※ ㈜동명기술공단 동기공 제2016-1079호(‘16.03.29)

1		책임감리 용역 현황

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사 전면책임감리용역

○ 계약금액 : 금4,876,496천원(6차 : 금797,135천원)

○ 용역기간 : ‘10.08.05 ~ ‘16.12.31(6차 : ‘15.04.15 ~ ‘16.03.31)

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단 건축사사무소 외 3개사

□ 발주 현황

(단위 : 백만원)

구분	총괄	1~5차(준공)	6차(진행중)	장 래	비고
용역기간	‘10.08.05 ~’16.12.31	‘10.08.05 ~15.04.14	‘15.04.15 ~16.03.31	-
용역비	4,876,496	2,055,000	797,135	2,024,361

2		보고 내용

○ 7차 발주 계획

- 용역기간 : ‘16.04.01 ~ ’16.12.31

- 계약금액 : 금793,500천원

- 투입인원 : 68.675인·월

- 감리원 투입계획

등 급		계약기간 및 감리투입계획	비 고
토목	감리사	‘16.04.01 ~ 16.12.31
	감리사보	‘16.04.01 ~ 16.12.31
	감리사보	‘16.04.01 ~ 16.12.31
건축	감리사	‘16.04.15 ~’16.12.31
	감리사보	‘16.07.01 ~’16.12.31
기계	감리사	‘16.04.15 ~’16.12.31
	감리사보	‘16.07.01 ~’16.12.31
전기	고급	‘16.07.01 ~’16.12.31
소방	기술지원감리원	‘16.07.01 ~’16.12.31

- 7차 발주 투입된 토목분야 감리원 등급조정 시행

· 수석감리사 → 감리사,  감리사 → 감리사보,  감리사보(등급조정 없음)

3		조치 계획

○ 923공구 공사추진에 따라 아래와 같이 전면책임감리용역(7차)을 발주코자 함.

구 분	용역기간	계약금액	비 고
7차	착수일로부터 ~‘16.12.31	793,500천원

붙 임 : 1. 책임감리원 검토의견 1부.

2. 설계내역서(7차) 1부.  끝.