문서번호	방재시설부-4628
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
박중모		김흥근	04/01 임춘근
협 조

「합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사 건설폐기물 처리용역」

설계변경 검토보고(총차 2회, 2차 1회)

2016. 3.

방재시설부

「합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사 건설폐기물 처리용역」

설계변경 검토보고 (총차 2회, 2차 1회)

『합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사 건설폐기물 처리용역』의 설계변경(총차 2회, 2차 1회)에 대한 검토 보고임.

▶ 서울시설관리공단 공사감독1처-1963(2016.04.01.)호와 관련임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역개요 : 건설폐기물 운반 및 처리 1식

○ 용역기간 : ’13. 3. 5.  ~ ’16. 4. 30.

○ 용 역 비 : 금63,138천원 (2차분 30,138천원)

○ 용 역 사 : ㈜명한종합환경  대표 김정훈

□ 위탁감독 보고내용

○ 변경사유

- 총차 2회 및 2차 1회

․ 본 공사(합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사) 실정보고 사항 반영에 따른 폐기물 운반 및 처리 설계변경

○ 수량변경

- 총차 2회

구 분	단 위	당 초	변 경	증⦁감	비 고
1.폐기물처리
1)폐콘크리트	톤	1,480	1,994	증)514
2)폐아스콘	톤	59	62	증)3
3)건축폐재류	톤	632	934
3)혼합건설폐기물	톤	142	177	증)35
2.폐기물운반	톤	2,313	3,167	증)854

- 2차 1회

구 분	단 위	당 초	변 경	증⦁감	비 고
1.폐기물처리
1)폐콘크리트	톤	291.77	805.77	증)514
2)폐아스콘	톤	48.47	51.47	증)3
3)건축폐재류	톤	563.26	865.26	증)302
3)혼합건설폐기물	톤	74.64	109.64	증)35
2.폐기물운반	톤	978.14	1,832.14	증)854

○ 금액변경

- 총차 2회

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증⦁감	비 고
1)순공사비	57,398,182	78,850,000	증)21,451,818
①폐기물운반비	19,725,264	27,008,176
②폐기물처리비	37,687,752	51,863,496
단수조정	-14,834	-21,672
1.공급가액	57,398,182	78,850,000	증)21,451,818
2.부가가치세	5,739,818	7,885,000	증)2,145,182
3.용역금액	63,138,000	86,735,000	증)23,597,000

- 2차 1회

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증⦁감	비 고
1)순공사비	27,398,182	48,850,000	증)21,451,818
①폐기물운반비	8,341,578	15,624,490
②폐기물처리비	19,064,574	33,240,318
단수조정	-7,969	-14,807
1.공급가액	27,398,182	48,850,000	증)21,451,818
2.부가가치세	2,739,818	4,885,000	증)2,145,182
3.용역금액	30,138,000	53,735,000	증)23,597,000

○ 위탁감독 의견

- 상기와 같이 “합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사” 의 기 실정보고 사항(공사감독1처 –1367호, 2016.3.8.)을 반영한 폐기물처리용역 총차 2회, 2차 1회 설계변경 사항으로 적정함.

□ 검토 의견

○ 위탁감독기관에서 제출한 건설폐기물처리용역 설계변경 건을 검토한 바, 본 공사 설계변경사항을 반영한 건으로서 적정한 것으로 판단되며, 건설총괄부에 변경계약 의뢰코자 함.

붙임 : 1. 관련문서 1부.

2. 관련보고서 1부.

3. 설계변경내역서(총차 2회) 1부.

4. 설계변경내역서(2차 1회)  끝.