투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시철도공사사장
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 기간연장 승인 통보[구로구 오류동 천왕역 승강편의시설 설치공사]

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울특별시도시철도공사 기술지원단-3818(2016.03.29.)호와 관련입니다.

3.  위 호와 관련하여 『교통안전시설 원인자부담공사 준공기한 연기 요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 구로구 오류동 천왕역 승강편의시설 설치 교통안전시설물 설치공사(신호)

나. 원 인 자 : 서울특별시도시철도공사(기술지원단)

다. 감 리 사 : ㈜트래픽스

라. 시 공 사 : 화성전기

마. 변경내용 및 요청 : 공사기간 변경에 따른 준공기한 연장

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	승인통지일 ~ 2016.03.29.	승인통지일 ~ 2016.08.21.

바. 변경사유

- 천왕역 승강편의시설 설치공사와 관련한 선행공정인 토목공사의 준공기한

연장으로 인한 후속공정인 교통신호기 공사 기간 변경.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	홍승찬		기전과장	04/01 박재경
협조자	주무관	최승호
시행	기전과-4135	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개