투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	우기철 대비 공정계획수립에 따른 실정보고(야간공사 등) 승인 통보

1. 잠원2감 2016-69호(2016.03.30)호와 관련입니다.

2.「잠원2 빗물펌프장 신설공사(자연방류관로)」추진에 따른 교통처리계획 변경 이행 및 우기전 관로부설 완료를 위한 야간공사 등 실정보고사항에 대하여 대하여 승인 통보 하오니,     공사 추진시 교통정체로 인한 주민불편이 최소화 될 수 있도록 교통신호수 배치 등 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 야간 전담 감리원 배치

- 기간 : 2016.4.4.~5.31(야간공사 종료시까지)

- 분야 : 토목.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)에스트건설 현장대리인,잠원2빗물펌프장신서공사 책임건설사업관리기술자
주무관	이병환		치수시설과장	04/01 김흥근
협조자
시행	방재시설부-4639	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(프리미어플레이스빌딩 14층) 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8773	/전송	02-3708-8756	/	bhl923@seoul.go.kr	/	대시민공개