문서번호	정수시설과-924
결재일자	2016.4.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이상훈		김긍채	04/01 박기석
협 조
	주무관			김동우

배출수지 정류벽 제작구매설치 계획

2016. 3.

강북아리수정수센터

정 수 시 설 과

배출수지 정류벽 제작구매설치 계획

배출수지 내 설치된 정류벽 설치 및  모래호퍼를 정비하여 역세척수 처리효율 향상시켜 고품질에 아리수를 생산하고자 함.

Ⅰ				추진 근거

정수과-466(2016.02.11)호 『배출수지 정비 계획』 방침

Ⅱ				배출수지 현황

배출수지 현황

구조	규 격 (L×W×H)	지별 총용적	지 수	2016년 정류벽 설치 예정
장방형 콘크리트	32m×11m×4.5m (1,600㎥×4지)	1,584㎥	4지	1개지

정류벽 설치 현황

구분	1지	2지	3지	4지	비고
정류벽	설치 (정류공 일부 파손)	설치 (정류공 일부 파손)	신규 설치 (효율 개선)	미설치	4지 폐여과사 미검출로 불필요
호퍼	메움	메움	메움 예정	메움 예정

Ⅲ				사업 개요

사 업 명	: 4계열 침전지 중앙분리벽 제작구매설치

사업기간	: 착공일로부터 150일

소요예산액	:  140,000천원

- 정류벽설치 및 호퍼정비 : 약 40,000천원

- 슬러지 대차 정비 : 약100,000천원(기계분야 별도발주)

예산과목	: 자본적지출-유형자산취득-기계장치-시설비및부대비(시설비)

사업내역	: 정류벽 설치 55㎡  (HDPE 판넬, t=65㎜, 1개지(정류벽3지))
정류벽 보수 110㎡ (PE정류공 교체, 2개지(정류벽1지, 2지))
모래 호퍼 메우기 165㎥ (L 11m × B 5m × H1.5m × 2지(정류벽3,4지)))

배출수지 정류벽	배출수지 정류벽

계약방법

- 조달계약(특정제품심사위원회 개최 후 심의결과에 따라 본부 계약심사 후 조달계약)

Ⅳ				추진 일정

‘16.4.6 : 특정제품선정심사위원회 개최하여 자체 타당성 심사

- 심사 대상 : 특정 제품 및 공법(특허 10********호)

‘16.4.7   : 심사위원회 결과 설계에 반영, 본부 설계심사

‘16.4.   :본부 설계심사 반영, 조달계약 요청 (사업명 : 4계열 침전지 중앙분리벽 제작구매설치)

붙임문서 : 1. 설계내역서 및 도면 1부.
2. 배출수지 정비 계획 1부.  끝.