문서번호	소방행정과-4221
결재일자	2016.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
이용	임한선	이재호		04/04 장현태
협 조

홍은119안전센터 내진성능평가 계획

안전도시 기반 구축을 위한 -

홍은 119안전센터 내진성능평가 계획

2016. 4월

행 정 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

홍은119안전센터 내진성능평가 계획

안전도시 기반 구축을 위한 -

홍은 119안전센터 내진성능평가 계획

최근 국내‧외 지진발생으로 건축물의 안전도에 우려가 있어 공공건축물 지진방재대책에 따라 각종 재난‧재해 상황관리를 위한 소방청사에 대한 내진성능보강을 위한 내진성능평가 추진계획임.

Ⅰ		추 진 근 거

『소방행정과-3366(2016.2.5.)호『소방청사 공공건축물 내진성능평가 계획알림』

소방행정과-95(2016.1.4.)호『2016년도 소방안전특별회계 예산편성 결과 알림』

지진안전성 표시제 업무처리지침』(국민안전처 2015.10.30.)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조의2 제1항 (내진성능평가 등)

Ⅱ		기 본 방 향

설계도서 검토 및 안전진단 결과를 참조하여 대상 건물 내력 산정

건축구조기준(KBC코드)의 지진하중에 근거하여 설계된 지진하중 산정

내진성능 미 확보된 모든 소방청사에 대한 내진성능평가 우선 실시, 결과에   따라 내진성능 설계 및 보강공사 예정

Ⅲ		내진성능확보 현황

청사별

구 분	서대문소방서(본서)	북가좌	홍은	미근	구조대
동 수	1	1	1	1	1
내진성능 확보여부	확보 (2010년)	확보 (2006년)	미확보	미확보	확보 (2011년)

Ⅳ		추 진 계 획

사 업 명 : 홍은119안전센터 내진성능평가

추진기간 : 2016. 4월 ~ 5월

추진대상 : 1개 대상

연번	건물명	소재지	층수		연면적 (㎡)	건축년도
			지상	지하
1	홍은119안전센터	서대문구 홍은중앙로 83	3	1	709	1998

추진절차

용역업체 선정

○『시설물의 안전관리에 관한 특별법』제9조에 따른『안전진단전문기관』     등록을 필한 기관 중 견적비교 후 선정 (※사회적약자기업 우선 선정)

내진성능평가 용역 내용

○ 자료수집 및 내진성능평가 계획수립

○ 설계도면 및 관련자료 분석

○ 현황조사 및 관련자료 분석

○ 건축물에 따른 지진거동특성 분석

○ 자료정리 및 분석

○ 건축물에 적합한 내진성능 평가기법 선정

○ 구조해석 및 내진성능 평가

○ 내진성능 향상을 위한 보수·보강방안 수립

○ 최종보고서 작성 및 성과품 제출

추진일정

○ 기본계획 수립  .......................................................................  4. 4. ~ 6.

○ 공고 및 입찰  .........................................................................  4. 6. ~ 8.

○ 용역계약체결  .........................................................................  4. 11. ~ 14.

○ 용역착수 및 수행  ................................................................... 4. 14. ~ 29.

○ 완수검사  .................................................................................. 5. 2. ~ 6.

○ 대금지급  .................................................................................  5. 9. ~ 13.

Ⅴ		예 산 집 행

배정예산 : 7,100천원

연번	건물명	집행내역	배정예산 (천원)	비고
1	홍은119안전센터	내진성능평가 용역	7,100

예산과목 : 직무환경개선 / 소방청사 보수,보강공사/시설비(401-01)

계약방법 : 수의계약(전자수의시담)

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항

붙임 : 지진안전성표시제업무처지 지침 1부. 끝.