문서번호	급수운영과-6471
결재일자	2016.4.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장	중부수도사업소장
김용만	박혁순	김수영	04/05 유경애
협 조
	시설관리팀장		채재일
	주무관		代유형근
	급수설비팀장		김상웅

‘남산배수지 1,3지 내부방수,방식공사

설계변경 심의결과 보고

2016. 04

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

설계변경 심의 결과 보고

공사현황

가. 공 사 명 : 남산배수지 1,3지 내부방식공사

나. 공사기간 : 2015.11.10.~2016.04.07

다. 도 급 액 : *****************

********************************

라. 공사개요 : 도막방식 보수 13,522㎡, 부착방식보수 3,151㎡,

폼타이단면보수 5,535개소

마. 도 급 자 : ㈜창흥건설  대표 김명숙

바. 발 주 청 : 중부수도사업소 (급수운영과)

2. 설계변경 심의 개최

가. 안  건 : 남산배수지 1.3지 내부방수,방식공사 설계변경 심의

나. 장  소 : 중부수도사업소 (급수운영과 소회의실)

다. 일  시 : 2016.04.04(월). 16:00

라. 참석자 : **************************,

*******************

3.주요 설계변경 심의 내용

가.발주처 추가작업지시 반영

○ 배수지내 구체 반생 제거

- 관련근거 : 급수운영과-5407 (2016.3.7)

- 수 량 : 3,343개소 (남산배수지 1,3지)

○ 배수지내 바닥 콘크리트 홈파기 보수

- 관련근거 : 급수운영과-5407 (2016.3.7)

나.현장실정보고 반영

○ 남산배수지 폼타이제거 수량 증가

- 관련근거 : 급수운영과-5405 (2016.3.7.)

- 수 량 : 당초 5,535개소, 변경 9,367개소 (증3,832개소)

○  폐기물처리비 반영

- 관련근거 : 급수운영과-5405 (2016.3.7.)

- 수 량 : 45.57ton (혼합폐기물 45.57ton)

○ 남산배수지 임시전력 공급방법 변경

- 관련근거 : 급수운영과-5405 (2016.3.7.)

기존 발전기 5kw,960일 사용.임시전력 30kw 변경 배수지내 안전사고 예방등

4.주요 공종 증액사항

가. 주요 증액사항

공 종	규 격	당 초	변 경	증 ▪ 감
그라인딩	벽체,천정	16,684 ㎡	16,726 ㎡	증	42	㎡
타일압착붙임	바닥	3,151 ㎡	3,167 ㎡	증	16	㎡
바탕만들기	벽체,천정	13,522 ㎡	13,559 ㎡	증	37	㎡
폴리우레아 도막방수	t=2mm	13,533㎡	13,559 ㎡	증	26	㎡
균열주입보수	습식	115 ㎡	134 ㎡	증	19	㎡
폼타이제거 단면보수	t=30mm,100mm	5,535	9,367	증	3,832	개소
단면보수	t=30mm천정	1 ㎡	0 ㎡	감	-1	㎡
단면보수	t=30mm벽체	0 ㎡	4 ㎡	증	4	㎡

나.신공종 사항

호표	공 종	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액
제1호표	반생제거 단면보수	T=30mm	개	3,343	1,084	2,071,524
제2호표	콘크리트 커팅	홈파기	m	1,924	1,112	1,113,112
제3호표	버터플라이 밸브지수	800mm	개소	1	2,980,912	2,980,912

5.공사비 변경 현황

구 분	설 계 변 경 현 황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	969,858,000	995,775,000	증)25,917,000

6.심의결과 검토

가.신규공종 : 설계변경 당시 산정한 단가에 낙찰률 (87.673%)을 곱한        금액으로 공종별 단가 적용여부 – 검토한 바 낙찰률 적용으로 타당함.

나.물량증가공종 : 설계단가에 낙찰률 (87.673%)을 곱하여 ±3%이내로        공종별 계약단가 적용여부 – 검토한 바 계약된 단가 적용으로 적정함.

다.변경내역서에 대한 계산, 제잡비 요율 및 내역 등을 검토한 바 적정함.

7. 처리의견

- 상기 신규공종 및 물량변동 등에 따른 설계변경 심의 검토 사항에 대하여,

건설공사 계약심사 구분 및 설계변경 심의위원회 운영계획 (본부계약심사과      -84호 11.01.14)에 의거 상기 공사건은 설계심사대상공사 중 *************************************************를      실시하고, 검토사항을 설계변경에 반영시행 후 본청 재무과에 변경 계약의뢰      처리 코자합니다.

따로붙임 : 설계변경 심의위원회 개최 검토 의견서 1부.끝.