문서번호	시설과-2376
결재일자	2016.4.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경팀장	시설과장
김기수		남상국	04/05 김한준
협조
	주무관		전정아

『남산공원 녹지복원사업』 사회보험료 정산 및 설계변경 검토보고

2016. 4.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『남산공원 녹지복원사업』

사회보험료 정산 및 설계변경 검토보고

『남산공원 녹지복원사업』 시행과 관련 사회보험료 정산하고 현장여건 변경사항을 반영하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

공사현황

공 사 명 : 남산공원 녹지복원사업

도급금액 : 금257,551,400원

공사기간 : 2015. 12. 7. ~ 2016. 4. 6. (공정율 95%)

공사내용

- 식재공사

· 관목류 : 진달래, 생강나무 등 7종 825주

· 초화류 : 돌단풍, 바위취, 꼬리조팝 등 8종 2,830본

- 시설물정비 : 폐쇄약수터 3개소 및 저류조 3개소 정비, 데크쉼터 2개소 정비

도 급 자 : 임원개발주식회사 대표 이대성

설계변경 주요내용

구 분	주 요 변 경 내 용	비 고
시설물 정비	▶ 남산공원 석호정(국궁장) 이용시민 요구사항 반영 - 국궁장내 산책로 토사유출지역 정비 ·사면부 흙막이 목책정비 26m → 산책로 사면정비를 통한 토사유출 방지 및 안전한 산책로 조성	사회보험료 및 제경비 정산금액 활용

사회보험료 및 제경비 정산

구 분	정 산 내 용	정산금액
보험료 등 정산	▶ 건강보험료,연금보험료 등 미사용에 다른 정산 ․ 건강보험료 : 1,413,584원 ⇒ 0원 ․ 연금보험료 : 2,070,485원 ⇒ 0원 ․ 노인장기요양보험료 : 92,589원 ⇒ 0원 소 계	-1,413,584원 -2,070,485원 -92,589원 -3,576,658원
부대경비 정산	▶ 부대경비 정산 ․ 이 윤 : 18,707,685원 ⇒ 18,257,428원 소 계	-450,257원 -450,257원
계		-4,026,915원

도급비 (변경없음)

(단위:원)

구 분		도 급 비 (원)			비 고
		변 경 전	변 경 후	증 감
도급비	공 급 가 액	234,137,637	234,137,637	-
	부가가치세	23,413,763	23,413,763	-
	계	257,551,400	257,551,400	-

검토의견

설계변경 주요내용은 사회보험료 및 제경비를 정산하여 남산공원 석호정(국궁장)내 산책로 사면부 토사유출에 피해예방을 위해 불가피하게 시설보완 사항을 반영하고자 하며,

이용 시민들의 요구사항을 반영하여 공원시설물을 안전하게 이용할 수 있도록 정비하고자 함.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.