문서번호	시설보수과-2749
결재일자	2016.4.5.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	04/05 신현태
협 조
	주무관			김규춘

2016년 도로시설물 자체 정밀점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4

강서도로사업소

(시설보수과)

2016년 도로시설물 자체 정밀점검 시행계획

2016년 (해당)도로시설물 자체 정밀점검 계획을 수립 및 시행하여 도로시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ

관련근거

❍ 2016년 도로시설물 예산사업(공사/용역)추진계획 : 시설보수과-546(2016.1.20)

❍ 서울특별시 기술용역 타당성 심사결과(4개소) : 자체정밀점검으로 시행

❍ 도로안전본부 방침(2011.9.6.)

-‘12년 도로시설물 자체 정밀점검 시행계획(도로시설관리과-109811호)

∙ 시특법에 따른 정밀점검은 안전점검 전문업체에 용역으로 시행함이 타당하나,

기술용역 타당성심사 결과에 따라 자체 정밀점검 시행가능

∙ 자체 시행에 따른 전문성 확보 및 점검능력을 고려하여 형식적인 점검이 되지

않도록 외부전문가와 합동점검으로 추진

※ 시설물 종별 기술자 등급별 적용 비율

- 2종 및 법정외 시설물 : 특급기술자 33%, 중급기술자 67%

Ⅱ

점검시설물 현황

(단위:천원)

연번	시설물명	위 치	준공 년도	규 모	상태 등급	노선명	비고 (‘16년예산)
계							(14,740)
1	광복교	구로구 개봉동192 ~ 철산산1	1977.7	폭 19.1m 연장 67m	B (법외)	남부순환로	(7,700)
2	고척2 지하차도	구로구 고척동62	1991.12	폭 14.0m 연장 415m	B (법외)	안양천길	(7,040)
3	여의2 지하차도	영등포구 영등포동7가94	1990.2	폭 17.5m 연장 380m	B (법외)	노들길	( 0 )
4	여의하류 지하차도	영등포구 여의도동 80-1	1993.10	폭 27.0m 연장 61m	B (법외)	노들길	( 0 )

※ 여의2지하차도 및 여의하류지하차도는 서울시 시설관리공단에서 인수(2016.1월)한 시설물     로서 예산 전용이 불가함

□ 소요예산 : 26,882천원

❍ 재배정액 : 14,740천원(광복교 외1개소)

❍ 부 족 액 : 12,142천원(여의2지하차도 외1개소)

※ 2016년 안전진단 및 정밀점검용역 예산에서 발생한 낙찰차액 활용

❍ 예산과목

- 안전총괄본부, 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물 운영, 시설물 안전점검 및

진단, 시설비

- 안전총괄본부, 교량안전과, 교량관리, 교량시설물 점검관리, 교량시설물 안전점검 및

진단, 시설비

Ⅲ

정밀점검 시행

❍ 점검일정 : 2016. 4. 11 ~ 7. 11(3개월간)

❍ 점검방법

- 시설물 점검 수행자(담당자)와 외부전문가 합동으로 점검 시행

- 정기점검 보다 비교적 정밀하고, 정밀점검 보다는 다소 범위를 축소하여 점검

- 유지관리상 중요부분에 대하여 육안검사와 간단한 측정기구 활용하여 점검

(균열게이지, 비파괴시험 등)

- 외부전문가 기술자별 업무 범위

∙ 특급기술자 : 외관조사 및 구조적인 결함상태 체크 및 시설물의 상태평가

∙ 중급기술자 : 외관조사, 현장시험 결과분석, 용역보고서, 외관조사망도 작성

❍ 점검조 편성

- 점검책임 : 책임기술자(특급기술자)

- 점검인원 : 총 4인(시설물별)

∙ 담당수행자 : 1인

∙ 외부전문가 : 3인(각 조별 특급기술자 1인, 중급기술자 2인 구성)

- 점검조 편성현황(4인 → 특급1, 중급2, 담당1)

구분	대상시설물	수 행 담당자	외부전문가		비고
			특급기술자	중급기술자
계	4개소	1명	2명	4명
1조	- 광복교 - 고척2지하차도	김승진	고삼암(특급)	최진선(특급)	㈜한맥기술
				이기종(특급)
2조	- 여의2지하차도 - 여의하류지하차도		박훈규(특급)	엄홍섭(특급)	㈜한국종합 시설안전
				최호영(중급)

❍ 외부전문가 선정기준

- 건설기술자 경력증명서 확인(한국건설기술인협회 발행)

- 전문성 확보를 위해 자격등급 및 경력, 교육이수(정밀안전진단교육-교량및터널)            등 조건을 갖춘 자를 선정

- 안전점검 경험과 사업소관리 시설물의 특성 및 상태 등에 대한 지식이 많은 자

Ⅳ

점검비용 산정

❍ 외부전문가 소요인력 산출근거

- 인원산정 기준 : 시설물별 정밀점검용역 인원(안전점검 및 정밀안전진단 대가기준)

- 기술자 등급별 인원 : 법정외 시설물로써 특급기술자 33%, 중급기술자 67%

❍ 시설물별 점검비 산출내역

구분	시설물명	준공 년도	규 모(m)		점검인원(인)			점검비용(천원)					합계 (천원)
			폭	연장	소계	특급	중급	인건비			동원 장비비	인쇄비
								계	특급	중급
합 계					112	38	74	23,682	9,918	13,764	2,400	800	26,882
1조	광복교	1977	19.1	67	30	10	20	6,330	2,610	3,720	600	200	7,130
	고척2 지하차도	1991	14.0	415	28	10	18	5,958	2,610	3,348	600	200	6,758
2조	여의2 지하차도	1990	17.5	380	30	10	20	6,330	2,610	3,720	600	200	7,130
	여의하류 지하차도	1993	27.0	101	24	8	16	5,064	2,088	2,976	600	200	5,864

※ 2016년 엔지니어링기술자 노임단가 (특급261,026원, 중급186,414원)에서 백원 단위 절삭

❍ 점검조 및 외부전문가별 점검비 산출 내역                       (단위 : 천원)

조별	전문가 성 명	등급 (직무)	단 가 (원)	점검일 (일)	인건비	동원장비비	인쇄비	계
합 계				112	23,682	2,400	800	26,882
1조	고삼암	특급	261,000	20	5,220	1,200	400	5,754
	최진선	중급	186,000	19	3,534			4,067
	이기종	중급	186,000	19	3,534			4,067
2조	박훈규	특급	261,000	18	4,698	1,200	400	5,232
	엄홍섭	중급	186,000	18	3,348			3,881
	최호영	중급	186,000	18	3,348			3,881

Ⅴ

세부 추진계획

❍ 개 요

- 점검기간 : 2016. 4. 11 ~ 7. 11(3개월간)

- 점검대상 : 광복교 등 4개 시설물

- 소요예산 : 26,882천원(인건비 23,682천원, 동원장비비 2,400천원, 인쇄비 800천원)

- 점검인원 : 112인 (외부전문가 특급 38인, 중급 74인)

- 과업범위

□세부 점검일정 및 수행계획 제출

□자료수집 분석, 외관조사, 현장시험

□외관조사 결과분석 및 상태평가 (부재별, 시설물 전체)

□외관조사망도 및 정밀점검 보고서 작성 (추가사항 발생시 별도 보고)

❍ 추진일정

- 2016. 4월초  : 전차 용역보고서 등 자료제공 (시설물별 담당자)

- 2016. 4월중  : 과업수행계획서 제출 (각 조별 외부전문가)

- 2016. 6월말  : 점검 결과보고 및 보고서 제출(외관조사결과, 보수방안등)

- 2016. 7월초  : 점검비 지급 및 시스템 입력 (각 개인별)

Ⅵ

행정사항

❍ 외부전문가 점검수당은 점검 완료보고 후 개인별 은행계좌로 지급(장비비등 포함)

- 점검비는 소득세 5% 공제, 주민세는 소득세의 10% 공제후 지급

❍ 필요시 사업소 보유 고소 작업차 지원

❍ 필요시 추가 과업지시사항은 실비정산 예정(예산 범위내)

❍ 점검결과 도로관리시스템, NDMS 등에 입력(시설물 담당자)

붙  임 : 1. 2016년 자체정밀점검 과업범위 및 보고서작성 1부

2. 시설물별 외부전문가 점검인력, 인쇄비 등 산출내역 1부

3. 인원산정 내역서 1부

4. 2012년 도로시설물 자체정밀점검 시행계획(도로시설관리과) 1부

5. 2016년 도로시설물 예산사업(공사,용역) 추진계획 1부

6. 2015년 기술용역 타당성심사 결과 통보서(별도보고) 1부

7. 외부전문가 경력증명서 및 정밀안전진단과정교육 수료증(별도보고) 1부.  끝.