문서번호	급수운영과-7794
결재일자	2016.4.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김용섭		함현준	04/05 박길영
협 조

가시설 구조설계 및 안정성 검토에 대한 업체선정(안) 검토 보고

[마포구청역~성산2교간 송배수관정비공사]

2016. 04.

서부수도사업소

(급수운영과)

가시설 구조설계 및 안정성 검토에 대한 업체선정(안) 검토 보고

[마포구청역~성산2교간 송배수관정비공사]

우리사업소에서 시행중인 『마포구청역~성산2교간 송배수관정비공사』 와 관련하여 서울시시설관리공단으로부터 가시설 구조설계 및 안정성 검토에 대한 업체선정(안) 보고서가 제출되어 아래와 같이 검토 보고합니다

※. 관련근거 : 서울시시설관리공단 공사감독2처-1937(2016.04.04.)

Ⅰ		공사 현황

○ 공 사 명 : 마포구청역~성산2교간 송배수관정비공사(비굴착갱생)

○ 공사개요 : D= 700mm, L= 730m

○ 공사기간 : 2015. 12. 3 ~ 2016. 8. 27

○ 계약금액 : 764,525,900원

○ 도 급 자 : 호용종합건설(주)   대표 김익관

Ⅱ		시설관리공단 검토내용

1) 토목구조 전문업체 선정(안) - □견적 최저가 선정□

(단위 : 천원, VAT제외)

구 분	견 적 서			엔지니어링 사업대가의 기준	비 고
	㈜대한 콘설탄트	㈜한국종합 엔지니어링	㈜우일 엔지니어링
금 액	7,500	8,000	8,500	8,696	토공+가시설 설계단가기준
선 정	◎

※ 엔지니어링 사업대가의 기준 : 제3장 공사비요율에 의한 방식(붙임 참조)

2) 개략공사비 비교표

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
가시설 구조설계 및 안정성검토비	-	6,518,182	증6,518,182	낙찰율: 86.917%
V.A.T	-	651,818	증 651,818
도급 금액	-	7,170,000	증7,170,000

3) 검토 결과

○ 가시설 구조설계 및 안정성검토에 대한 설계용역 3개사 중 최저가 업            체인 □(주)대한콘설탄트□에 의뢰하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

Ⅲ		사업소 조치 의견

○ 위 시설관리공단 검토의견과 같이 최저가 업체인□(주)대한콘설탄트□            업체로 선정하는 것이 타당하므로 시설관리공단에 승인통보코자 합니다.

붙임 : 관련서류 각 1부.  끝.