문서번호	조경과-4673
결재일자	2016.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경관리팀장	조경과장
변동풍		조윤래	04/06 代김호석
협조

‘2016년 가로수 생육환경 개선사업’

대상지 변경승인 요청 검토보고

푸른도시국

(조경과)

‘2016년 가로수 생육환경 개선사업’

대상지 변경 승인 요청 검토보고

용산구에서 ‘가로수 생육환경 개선사업’ 추진과 관련하여 사업 대상지를  재조사하여 변경승인 요청이 있어 검토하고 보고합니다.

[관련대호 : 용산구구 공원녹지과-5541(2016.4.1.)호]

1		사업개요

❍ 대 상 지 : 용산구 백범로(구용산구청 ~ 효창파크푸르지오)

❍ 규    모 : 670㎡(연장 190m)

❍ 사업기간 : 2016. 2. ~ 11.

❍ 사 업 비 : 금168백만원

❍ 사업내용 : 가로수 아래 띠녹지 조성

2		추진과정

❍ 2015. 7.    : 사업대상지 신청 접수

❍ 2015. 8.    : 신청지 검토 및 예산편성 요구

❍ 2015.12.    : 예산편성 확정

❍ 2016. 2. 5. : 사업추진계획 수립 및 시달(서울시)

❍ 2016. 4. 1. : 사업 대상지 변경 승인 요청(용산구)

3		변경 요청사항

❍ 변경사유

- 사업대상지(백범로)에 2열로 띠녹지를 계획하였으나 사유지가 포함되어 띠녹지의 2열 조성이 곤란하여 1열로 조성하고

- 남는 사업비로 타 대상지의 가로수와 띠녹지 메워심기 추가

❍ 변경 대상지 내역

구 분	당 초	변 경
대상지	백범로(구용산구청 ~ 효창파크푸르지오)	백범로(구용산구청 ~ 효창파크푸르지오), 원효로, 이태원로 등
규 모	띠녹지 조성 190m(690㎡)	띠녹지 조성 190m(285㎡) 띠녹지 메워심기 558m(518㎡) 가로수 메워심기 19주
사업비	금168백만원	금168백만원
토지현황	가로수 아래 유휴공지	가로수 아래 유휴공지

4		검토결과

구 분	검 토 기 준	검 토 결 과	비 고
대상지	유효보도폭 2m 이상 가능 가로(보도)	적합
규 모	190m(690㎡)	적합	조성 면적 축소
사업비	금168백만원	적합
토지현황	가로 아래 유휴공지	적합

5		보고자 의견

❍ 검토결과 신청지가 가로수 생육환경 개선사업을 대상지로써 적합하고, 당초 대상지에 사유지가 포함되어 사업 연장은 변화없이 부득이 면적을 축소하고 남는 사업비로 가로수와 띠녹지를 메워심기하고자하는 것으로 가로수 생육환경 개선사업의 목적에 타당하여 승인처리하고자 함.

붙임 : 가로수 생육환경 개선사업 대상지 변경 요청서 1부.  끝.