서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	1종교량 보수보강공사 책임건설사업관리기술단장 귀하
(경유)
제목	작업기한 연기 승인[2016 교량시설물 일상유지보수공사(강남) 1차)]

1. 1종교량 제16-03호(2016.3.30)호와 관련입니다.

2. 위 호로 작업기한 연기 승인요청하신 사항에 대하여 검토하고 아래와 같이 그 결과를 회신하오니 시설물 보수공사 책임 감리업무수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 2016 교량시설물 일상유지보수공사(강남)

나. 작업기간 연기요청 내역(1차)

1) 당초 2016. 2.16 ~ 3.31 ⇒ 변경 2016.2.16. ~ 7.10

다. 연기 사유 : 보라매고가 방음벽 파손구간 보수 공기 연장 필요(납품업체 생산 지연으로 기한내 시공불가)

라. 검토결과 : 작업기간 연기 승인(다만 시민불편사항임을 고려하여 조속한 시일내 납품이 될 수 있도록 독려하여 주시기 바람). 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	전재형		강남일반교량팀장	정회평		교량안전과장	04/07 박문희
협조자
시행	교량안전과-6255	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2층 교량안전과	/
전화	02-2133-1975	/전송	02-2133-1429	/	jahe2000@seoul.go.kr	/	대시민공개