투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	(주)한일이앤에스 대표 귀하
(경유)
제목	나들목 감시장치(16-2차) 작업기간 연장 요청 승인

1. 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역과 관련하여 제품 납품 지연에
따른 제16-2차 작업지시의 작업기간 연장요청에 대하여 아래와 같이 승인하오니 작업기간을 엄수하여 주시기 바랍니다.

-  아      래  -

가. 용 역 명 : 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역

나. 작업지시번호 : 제 16- 2차

다. 사    유 : 제조사의 제품 납품 지연

라. 변경사항

구 분	변경 전	변경 후
작업완료일	~ 2016. 4. 12.	~ 2016. 4.19.

붙임. 16-2차 작업지시 공기연장 공문 1부. 끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	이학수		기전설비과장	04/07 김남수
협조자
시행	기전설비과-1230	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0673	/전송	02-0780-0744	/		/	부분공개(7)