문서번호	도시철도토목부-4421
결재일자	2016.4.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
장대성		김정수	04/08 김진팔
협 조
	주무관			임경태
	주무관			이재선

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』 건설사업관리용역(3차) 발주계획 보고

2016.  4.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

건설사업관리용역(3차) 발주계획 보고

하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사의 원활한 공사관리를 위한 건설사업관리용역(3차) 발주계획 검토보고임.

※ 관련문서 : 대한(철도)16-69(2016.04.06) : 건설사업관리용역(3차) 계약요청

□ 용역개요

○ 계 약 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 계약금액 : 1,981백만원

○ 계약기간 : '15.03.13 ～ '18.08.18 (2차분 '15.12.25 ～ '16.04.13)

○ 계 약 자 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

○ 과업대상 : 총 연장 1,836m (본선 : 471m, 입출고선 : 1,365m )

□ 추진경위

○ '15.03.06 : 하남선1-2공구 건설공사 건설사업관리용역(1차) 계약

○ '15.03.13 : 하남선1-2공구 건설공사 건설사업관리용역(1차) 착수

○ '15.03.27 : 하남선1-2공구 건설공사(1차) 계약

○ '15.03.30 : 하남선1-2공구 건설공사(1차) 착공

○ '15.12.22 : 하남선1-2공구 건설공사 건설사업관리용역(2차) 계약

○ '15.12.24 : 하남선1-2공구 건설공사 건설사업관리용역(1차) 준공

○ '15.12.25 : 하남선1-2공구 건설공사 건설사업관리용역(2차) 착수

○ '15.12.31 : 하남선1-2공구 건설공사(1차) 준공

○ '16.03.21 : 하남선1-2공구 건설공사(2차) 착공

□ 발주시행 계획(3차)

(단위 : 백만원)

구 분	총 괄	기 발주	금회 발주	장 래
		1차~2차	3차
계약금액 (비 율)	1,981 (100%)	435 (22.0%)	413 (20.8%)	1,133 (57.2%)
계약기간	2015.03.13. ~ 2018.08.18.	2015.03.13. ~ 2016.04.13	2016.04.14. ~ 2016.12.31.

□ 건설사업관리기술자 배치계획(3차)

구 분		등급	2016년													비고
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
토 목	책임건설사업관리기술자	특급
						14
	건설사업관리기술자	고급
						14
	보조건설사업관리기술자	중급
												1
	보조건설사업관리기술자	초급
						14
기술지원 건설사업 관리기술자	기술지원건설사업관리기술자	특급
						14

□ 조치계획

○ 하남선1-2공구 건설사업관리용역사가 제출한 3차분 발주 설계서에 대해 검토한 결과 관련 규정에 따라 적정히 산정됨.

○ 이에 따라 하남선1-2공구 건설공사 건설사업관리 용역(3차)를 조속히 발주하여 안전 및 품질관리에 만전을 기하고져 함

‣ 3차 계약금액 : 413,318천원

‣ 3차 계약기간 : 2016.04.14 ~ 2016.12.31까지

붙 임 : 1. 건설사업관리용역사 발주요청 공문 1부.

2. 건설사업관리용역(3차) 발주 설계서 1부.  끝.