문서번호	급수운영과-6420
결재일자	2016.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	강동수도사업소장
김종수	代김용현	04/08 김명용
협 조
	주무관		황대룡
	주무관		김용현

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

『누수발생에 취약한 아연도강관 등』

노후 인입급수관 일제 정비계획 보고

2016.  4.

강동수도사업소

「누수발생에 취약한 아연도강관 등」

노후 인입급수관 일제 정비계획 보고

누수발생 빈도가 높은 아연도강관, PVC관 등 노후 인입급수관을 사전 정비하여 유수율 제고 및 유지관리 업무에 철저를 기하고 함

▸ 관련근거「누수발생에 취약한 아연도강관 등」노후 인입급수관 일제정비 계획 보고」

(누수방지과-3435호, 2016. 4. 1)

Ⅰ		현 황

□ 노후 인입급수관(50㎜ 이하) : 2,583m

○ 급수운영과(송파구) : 1,910m, 시설관리과(강동구) : 673m

(단위 : m)

구 분	소 계	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜
소 계	2,583	549.1	260.2	196.2	187.2	1,390.1
아연도강관	2,536.7	549.1	260.2	167.8	187.2	1,372.4
PVC관	46.1			28.4		17.7

○ 전체 노후 인입급수관 2,583m 중,

- 일반지역의 노후 인입급수관             :   723m(27.9%)

- 재개발(재건축) 지역내  노후 인입급수관 : 1,860m(72.1%)

※ 재개발(재건축) 지역은 사업추진 관련 시행 여부 재 조사 확인

사업 미추진시 일반지역의 노후 인입급수관으로 관리

Ⅱ		정비 계획

□ 점검 및 정비기간 : ’16. 4. 11 ~ 9. 30

❍ 현장점검 : ’16. 4. 11 ~ 4. 30

❍ 정비기간 : ’16. 4. 11 ~ 9. 30

□ 정비 방법

❍ 해당지역의 노후 인입관 정비 및 GIS시설자료 수정 : 지역 담당자

❍ 재개발(재건축) 지역을 제외한 일반지역의 인입급수관은 즉시 정비하되,

- 현장조사하여 정비가 필요한 사항은 즉시 정비

- 기 개량 등 GIS 속성자료 수정이 필요한 경우 수정 조치

- 지장물로 인한 공사 불가 등 기타 사항 발생시 노후관대장 작성 등 집중 관리

❍ 재개발(재건축) 지역 인입급수관 관리 관련,

- 관리처분 단계는 실질적인 사업 진입단계(이주 및 철거)로 이주세대는 분기점 폐쇄하고 있어 GIS 시스템에서 인입급수관 이력 삭제

- 착공 단계의 재개발 지역은 GIS 시스템에서 지역내 상수도관 이력 삭제

- 사업시행 인가 단계에서는 노후관 정비시 중복 투자의 논란이 있어 정비대상에서 제외하고 노후관 대장작성 등 집중관리하여 관리처분 단계로 변경시 GIS 이력관리

※ 단, 적수출수 및 소출수 민원발생 등 사안에 따라 선별적으로 인입관정비 시행

Ⅲ		조치 의견

□ 재개발(재건축) 지역을 제외한 일반지역 노후 급수관 즉시 정비

❍  강동, 송파구 관내 급수공사 연간단가업체에 작업지시하여 정비 시행

❍  시설자료 수정이 필요한 경우 GIS 담당자에게 통보하여 수정 조치

□ 재개발(재건축) 지역 노후 인입 급수관 관리

❍  관리처분 및 착공단계는 상수도관 이력 삭제(GIS 담당 통보 및 수정)

❍  사행시행 인가 단계는 정비대상에서 제외, 노후관 대장작성 등 집중관리

Ⅳ		행정 사항

□ 노후 인입급수관 정비 추진 계획 수립 제출 : 4. 15(금)까지

□ 인입급수관 정비 실적 유수율 평가 반영(본부)

❍  평가사항

- 평가항목 : 인입관 개량실적 및 재개발 지역내 노후관 이력관리

- 평가점수 : 배점 2점

- 정비대상 : 아연도강관 및 PVC관(50㎜ 이하)

붙임 : 1. 노후 인입관현황 1부.

2. 관리대상 재개발․재건축 현황 1부.  끝.