문서번호	수도자재관리센터-6507
결재일자	2016.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
김정선		정인주	04/08 성시영
협조	계측관리과장		김영목
	행정관리팀장		정희순

고품질(전자기식,초음파식)

수도계량기 설치방법 개선방안 검토

2016. 4.

수 도 자 재 관 리 센 터

고품질 계량기 설치방법 개선방안 검토

대형 수도계량기의 불감률 및 검침환경 개선을 위해 추진 중인 고품질 계량기(전자기식,초음파식) 설치 작업이 미진하여 설치방법 개선방안을 검토하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ

일반현황

□ 관련근거

□ 2011년 대형계량기 고장율 저감 및 검침개선에 따른 시범운영

- 부본부장방침(고객지원과-101541, 2011.11.28.)

□ 대형계량기 불감률 개선방안 추진 : 신설수전 고품질계량기 적용시행

- 부본부장방침(계측관리과-457, 2012.10.31.)

□ 고풀질 계량기 설치 수용가 통보 : 2015년 고품질 설치수용가 대상

- 계측관리과-3967(2015.07.09.)

□ 고품질 계량기 구매 및 설치현황(2016.4.08.현재)

구 분	계	초음파식	전자기식	비 고
구 매 량	740	426	314
설치수전	459	281	178
재 고 량	251	121	130

Ⅱ

현안사항 및 개선방안

□ 현안사항

□ 본부 고품질 계량기 교체 통보대상 처리현황(2016.4.8.현재)

통보대상	조사건수(a)	교체가능 건수(b)	설치완료	비 율(b/a)
449	195	58	21	30%

□ 문제점 분석

□ 계량기 ↔ 외부표시기간 케이블 포설을 위한 터파기 공사 불가

∙ 대용량 수용가 중 공연장, 문화시설, 신축 상가 등은 대형화, 바닥면을 대리석으로    마감하는 등 고급화 하는 추세

∙ 자치구 마다 특화된 거리 조성을 위해 고급 보도블럭 마감재 사용

∙ 동일 장소에 대한 여러번 중복 굴착으로 인한 굴착 불가

□ 외부표시기 판넬 설치장소 선정 불가

∙ 미관 저해, 통행불편 등의 사유로 외부판넬 설치부지 제공 거부

□ 설치곤란 사례(최근 현장설치 방문 시 설치곤란 수용가가 70% 이상)

￭ 계량기실이 인도에 설치 ￭ 주변이 주차장으로 판넬설치 공간 없음		￭ 계량기실이 인도에 설치, 바닥 대리석 ￭ 판넬설치 공간 없으며, 수용가에서 설치 거부

□ 설치개선 검토 방안

현 행(유선연결)		개 선(무선통신)

□ 개선내용

- 수도미터의 사용량에 대한 검침 데이터를 외부표시기에 무선 전송

- 데이터 저장 및 변환장치는 맨홀 내부 상단에 설치

- 외부판넬 설치 부지 확보가 어려운 개소는 판넬 대신 표시기(벽부형) 부착

□ 기대효과

- 케이블 포설 터파기 미 시행으로 설치비 절감 및 민원발생 해소

- 대형 외부표시기의 소형화로 도시미관 저해 등 수용가 불만사항 최소화

- 설치곤란에 따른 문제 해결로 사업 계속성 확보

Ⅲ

개선방안 검토회의 개최 계획

□ 회의개요

□ 안    건 : 고품질 계량기 설치방법 개선방안 검토

□ 장    소 : 수도자재관리센터 회의실

□ 일    시 : 2016. 4. 26(화) 14:00~17:30

□ 참 석 자 : 본부 계측관리과,서울물연구원,수도자재관리센터,관련업체

□ 회의방법 : 고품질(전자기식, 초음파식) 계량기 제작 업체에서 무선          방식 방법 제안 발표 후 적정여부 및 문제점 분석 등 자유토론 방식

Ⅳ

향후 추진계획

□ 회의참석 요청 공문발송

□ 본부 계측관리과 및 서울물연구원 배급수연구과

□ 고품질(전자기식,초음파식) 계량기 제작업체(5개사)

- 현재 납품하는 방식의 고품질 계량기에 무선 설치방법 제안

□ 고품질(전자기식,초음파식) 계량기 무선방식 시범설치

□ 재고 계량기 업체별 시범설치 시행 : 6~7월 중

- 시범 설치량 : 추후 결정

□ 시범 설치 후 지속적인 모니터링 실시 : 약 1년

□ 모니터링 결과 문제점 등 파악 후 확대실시 검토.   끝.