투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 변경 계약의뢰(총괄1회 및 2차1회)

우리본부에서 시행중인 『하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』의 물가변동 및 건설사업관리기술자 투입시기 조정 등에 따라 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

나. 계 약 자 : ㈜동일기술공사 대표 김수보

다. 용역개요 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 건설사업관리

라. 계약현황 : 총괄) 3,593,800천원 (기간 : ‘15.03.13.~’19.04.10)

2차)   148,000천원 (기간 : ‘15.12.26.~’16.04.13)

라. 변경계약내용                                    (단원 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 (감)	비고
총괄	계약금액	3,593,800	3,701,909	증 108,109
	기 간	2015.03.13.~ 2019.04.10	2015.03.13.~ 2019.04.10	변경없음
2차	계약금액	148,000	156,000	증 8,000
	기 간	2015.12.26.~ 2016.04.13	2015.12.26.~ 2016.04.13	변경없음

바. 변경사유 : 물가변동(1회) 적용 및 건설사업관리기술자 투입시기 조정 등에 따른 설계변경

사. 예산과목 : 광역철도건설(교통개선분담금), 광역철도건설사업(교통개선분담금), 하남선(5호선연장) 광역철도건설(교통개선분담금), 시설비및부대비, 감리비 (명시이월)

광역철도건설(광역교통시설특별회계), 광역철도건설사업(광역교통시설특별회계), 하남선(5호선연장) 광역철도건설(광역교통시설특별회계), 시설비및부대비, 감리비

첨부  1. 건설사업관리용역 설계변경 검토보고서(총괄1회 및 2회1회) 1부.

2. 변경설계서(총괄1회 및 2차1회) 및 합의각서 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이경훈		토목1과장	代김용선		도시철도토목부장	04/08 김진팔
협조자	주무관	정삼기		기획예산과장	안순봉		계약2팀장	홍연화
시행	도시철도토목부-4469	(		)	접수		(		)
우	04520	중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 9층(도시철도토목부)	/
전화	02-772-7212	/전송	02-772-7306	/	lkh00n@seoul.go.kr	/	대시민공개