투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	SH공사사장
(경유)	기전사업부
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 기간연장 승인 통보[마곡지구 도시개발사업 교통신호등 공사]

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울특별시SH공사 기전사업부-1093(2016.04.04.)호와 관련입니다.

3.  위 호와 관련하여 『교통안전시설 원인자부담공사 준공기한 연기 요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 마곡지구 도시개발사업 교통신호등 공사

나. 원 인 자 : 서울특별시SH공사 기전사업부

다. 감 리 사 : ㈜건영이앤씨

라. 시 공 사 : 영진종합건설(주), 용우이엔씨(주)

마. 변경내용 및 요청 : 공사기간연장

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	승인통지일 ~ 2016.03.31.	승인통지일 ~ 2016.12.31.

바. 변경사유

- 선행공종 연기에 따른 순연.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	홍승찬		기전과장	04/08 박재경
협조자	주무관	최승호
시행	기전과-4494	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개