문서번호	도로보수과-3267
결재일자	2016.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
박승준		이화신	04/08 이석재
협 조
	기전과장			이영목
	주무관			박성록

2016년 상반기

아스팔트포장도로 직영정비 계획

2016. 4.

북부도로사업소

(도로보수과)

2016년 상반기

아스팔트포장도로 직영정비 계획

최근 지속적으로 발생되는 도로파손에 대한 노선별 발생현황 및 특성 등을 감안, 효율적인 정비계획을 수립하여 조속히 정비함으로서 안전사고 예방 및 시민불편 해소에 기여하고자 함.

1	현 황

도로현황 : 190.6 km, 5.37㎢

직영 도로정비 현황

구 분	합 계		소파보수		평삭		재포장
	건수(건)	면적(a)	건수(건)	면적(a)	건수(건)	면적(a)	건수(건)	면적(a)
계	29,630	1,023	29,295	323	138	254	197	447
2011년	6,878	390	6,774	81	63	160	41	149
2012년	5,623	165	5,558	54	22	4	43	107
2013년	9,492	215	9,409	66	3	23	80	127
2014년	3,193	157	3,148	50	27	54	18	53
2015년	4.444	96	4.406	72	23	13	15	11

2	기본방향

지난 겨울철 응급보수가 많았던 노선 중심으로 보수 실시

겨울철 상온아스콘을 사용한 응급복구 구간 동절기 전 완전복구 완료

보수면적은 크며, 주간 교통통제후 보수작업이 가능한 구간은 직영보수 실시

보수면적은 작으나 차량 통행량이 많아 주간 교통통제가 어렵고 야간공사가 필요한 시내 중심구간은 긴급복구 업체에 작업지시 (종로구간)

보유인력 및 장비를 최대한 활용하여 노면평삭 및 재포장작업 실시

작업자의 안전 확보 : 교통안전시설 설치

- 작업차량 1대 추가 배치하여 차량통제 등 작업자 안전업무 지원

3	세부추진계획

정비기간 : 2016. 04.  ~  06.

정비대상 : 동일로 외 7개소 연장 967m, A= 32.2@

※ 정비규모 및 세부작업 일정 : 붙임 “정비 계획” 참조

작업방법

- 기존 포장불량 구간 표층 5cm ~ 10cm절삭 후 덧씌우기

- 현장여건에 따라 주변 불량부분까지 작업시행

- 작업시간 : 주간 09:00~18:00

투입인력

- 인력 : 16명 (담당 1명, 조종원 8명, 공무직 8명)

투입장비

- 운반 : 더블캡 2대, 이-마이티 1대,

- 포장 : 평삭기 1대, 휘니셔 1대, 덤프 4대, 바브캡 1대,  로울러 2대,

- 기타 : 다목적(물차) 1대, 셀프로더 1대 등

투입자재 : 아스콘(#78, #67) 약 390톤 예상

4	행정 사항

소요 장비 및 조종원 지원 협조 : 기전과

붙 임 : 아스팔트 포장도로 직영정비 세부계획 1부.  끝.