문서번호	급수운영과-7051
결재일자	2016.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
차승현		04/08 조상덕
협 조

준공기한 연기보고(신설75)

2016. 04.

강남수도사업소

(급수운영과)

준공기한 연기보고

1. 현    황

○ 공사위치 : 강남구 논현**********

○ 작업지시 : 신설 75

○ 공사개요 : 신설(D=25mm, L=4m)

○ 공사기간 : 2016.03.19.~2016.04.02.

2. 보 고 내 용

○ 상기 위치는 공사현장 일정상의 이유로 수요가로부터 본 공사건에 대하여 공사기간 연기를 요청한 사항임.

3. 조치의견

○ 상기 보고내용에 의거 현재 작업지시한 공사건에 대하여 아래와 같이 공사기간을 연기하고자 합니다.

․ 당초 : 2016.03.19.~2016.04.02.

․ 변경 : 2016.03.19.~2016.04.30.

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.