문서번호	주차계획과-4728
결재일자	2016.4.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
금종융		김종상	04/11 윤보영
협조

남가좌2동 제2공영주차장 건설 (서대문구) 예산교부 검토

2016. 4.

도시교통본부

(주차계획과)

남가좌2동 제2공영주차장 건설 예산교부 검토

서대문구에서 추진중인『남가좌2동 제2공영주차장 건설사업』관련 ‘16년 예산편성된 주차장 사업비(시비) 교부 요청함에 따른 검토결과 보고

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 서대문 남가좌2동 3-75 외 8필지 (A=1,134㎡)

○ 규    모 : 99면 (지하1~지상2층 (3층4단), 연면적 2,693㎡)

○ 총사업비 : 8,197백만원

구 분	총사업비	투 자 계 획			비고
		‘15	‘16	‘17~
계	8,197	1,932	4,297	1,968
시 비	4,918	-	2,950	1,968
구 비	3,279	1,932	1,347	-

○ 사업기간 : ‘14.8 ~ ‘17.10.

Ⅱ. 추진현황 및 향후계획

○ ‘14.8.21 : 건설계획 수립 (서대문구)

○ ‘14.10~12 : 기술용역(타당성조사) 시행 (서대문구)

○ ‘15.3.27 : 시 투자심사

○ ‘15.8.13 : 도시계획시설(주차장) 결정

○ ‘15.12~ ’16.9 : 보상시행

○ ‘16.3~ ’16.7 : 기본 및 실시설계 용역

○ ‘16.10~ ’17.10 : 공사 시행

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 남가좌2동 제2공영주차장 건설 예산 교부 요청

- 관련공문 : 2016년 주차장건설사업 시비보조금 배정요청

: 서대문구 교통행정과-17140호 (‘16.4.6)

□ 주차장 분야별 사업비 (단위: 백만원)

구 분		사업비	시 비	구 비	발주시기	비 고
계		8,197	4,918.2	3,278.8
보상비	보 상	4,595.7	2,950	1,645.7	‘15.11.~‘16.9.
설계용역	설계용역	132.3	-	132.3	‘16.2.~7.
공사발주	토목,건축	2,993.7	1,492.9	1,500.8	‘16.10.~
	전 기	94.3	94.3	-
	소방전기	157.2	157.2	-
	통 신	147.2	147.2	-
	기계	25.3	25.3	-
감리비	시공감리	51.3	51.3	-	‘16.10.~

□ 예산배정 검토(주차장건설)

○ 사업비 배정 현황(자치단체 자본보조, 단위: 백만원)

구 분	계	‘15년이전	‘16년			‘17년~	비고
			계	기배정	금회배정
계	8,197	1,932	4,297	-	4,297	1,968
시 비	4,918	-	2,950	-	2,950	1,968
구 비	3,279	1,932	1,347	-	1,347	-

□ 요청 사유

○ 토지보상금(2,950백만원) 지출 소요예산 확보 등에 따른 시비배정 요청

□ 검토 의견

○ 동 사업은 현재 토지보상 및 기본 및 실시설계용역 시행중이며 추진일정에 따라 사업은 정상적으로 추진중인 것으로 판단되며

○ ‘16.9월내 토지보상비 지출 등에 필요한 ‘16년 편성된 시비 2,950백만원 요청하는 사항으로 사업이 원활하게 이루어질 수 있도록 예산배정함이 타당하다고 사료됨.

첨부   예산교부 요청공문 1부.   끝.