투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	'월드컵공원 무장애 친화공원 조성사업' 준공기한 연기 의뢰

1. 재무과-62690호(2015. 12. 16.) 및 시설과-1293호(2016. 4. 8.)호와

관련입니다.

2. 우리 서부사업소에서 추진 중인 ‘월드컵공원 무장애 친화공원 조성사업’에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 월드컵공원 무장애 친화공원 조성사업

나. 공사기간 : 2015. 12. 16. ~ 2016. 4. 15.

다. 계약금액 : 679,879,000원

라. 계 약 자 : ㈜수야조경개발 대표 송경수

마. 당초준공일 : 2016. 4. 15.

바. 변경준공일 : 2016. 5. 30.

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

아. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

자. 연기사유 : 추가공종 발생에 따른 절대공기 부족

붙임  1. 준공기한 연기 조치 의뢰서 1부.

2. 실정사항 검토보고서 1부.  끝

	서부공원녹지사업소장
주무관	정순주		조경시설팀장	이용원		시설과장	전결 04/11 임병국
협조자
시행	시설과-1305	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02)300-5534	/전송	02)300-5569	/	jsj130@seoul.go.kr	/	부분공개(5)