문서번호	도시철도토목부-4535
결재일자	2016.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
최경호		윤방식	04/11 김진팔
협 조

『서울지하철 9호선 개화차량기지 유치선 증설 궤도공사 』

예비 준공검사 결과 보고

2016. 04.

서울특별시도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『서울지하철 9호선 개화차량기지 유치선 증설 궤도공사』

예비 준공검사 결과 보고

서울지하철 9호선 개화차량기지 유치선 증설 궤도공사 1차 준공에 대한 준공 기한내 공사 완료 가능 여부 및 미진사항을 사전 보완을 위하여 예비 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 예비준공검사자 지정 명령부(2016.03.22.)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 개화차량기지 유치선 증설 궤도공사

○ 공사규모 : 궤도부설 5,107km, 분기기부설 23틀.

○ 공사기간 : 2016.01.05. ~ 2016.08.04.

○ 계약금액 : 일금 2,494,961,000원

○ 계 약 자 : 궤도공영(주)

○ 건설사업관리용역사 : ㈜신승엔지니어링, ㈜진우엔지니어링

□ 예비 준공검사 현황

○ 검사일시 : 2016.03.30.(수)

○ 장    소 : 개화차량기지 회의실 및 현장

○ 예비 준공검사자 : 도시철도토목부 정중규, 조태현

○ 입 회 자

- 발주처 : 공사관리관 최경호

- 건설사업관리기술자 : 책임건설사업관리기술자 국영호

- 시공사 : 현장대리인 한상수

□ 1차 공사 추진현황

○ 공사기간 : 2016.01.05. ~ 2016.04.04.

○ 계약금액 : 일금 800,000,000원

○ 공 정 률 : 99%

○ 시공현황

구 분	규격	단위	수량	단가	계약금액	준 공 금 액		비고
						수량	단위
A5. 궤도자재(사급)		식	1		664,663,309	1	664,663,309
PC침목	이음매부	개	150	168,997	25,349,550	150	25,349,550
PC침목	절연부	개	68	168,997	11,491,795	68	11,491,796
PC침목	직선형	개	6,380	64,133	409,168,540	6,380	409,168,540
PC침목	곡선형	개	830	64,999	53,494,170	830	53,949,170
레일패드	직선용	개	12,760	1,040	13,321,440	12,760	13,321,440
레일패드	곡선용	개	1,680	1,040	1,733,040	1,680	1,733,040
코일스프링클립	e2007	개	29,712	2,221	65,990,352	29,712	65,990,352
절연블럭	T= 8mm	개	27,222	865	23,302,032	27,222	23,302,032
절연블럭	T=10mm	개	830	865	717,950	830	717,950
절연블럭	T=12mm	개	830	893	741,190	830	741,190
절연블럭	T=14mm	개	830	937	777,710	830	777,710
이음매침목체결구	PCT용	개	300	128,265	38,479,500	300	38,479,500
이음매침목체결구	절연	개	136	128,265	17,444,040	136	17,444,040
이음매판	50kg용	개	60	44,200	2,652,000	60	2,652,000
C. 부대공사		식			435,380		435,380
시편제작	가스압접	개	2	217,600	435,380	2	435,380
직 접 공 사 비		식	1		665,553,690		665,553,690
간 접 공 사 비		식	1		134,446,310		134,446,310
공 사 도 급 비		식	1		800,000,000		800,000,000

□ 예비 준공검사 결과

○ 예비 준공검사 현 시점에서 준공물량(800백만원)에 대한 준공일자(‘16.04.04)전까지 완공이 가능할 것으로 판단되는바, 준공에 문제가 없음을 건설사업관리기술자에게 통보 하고자함.

붙임 : 예비 준공검사 서류 1부.  끝.