문서번호	토목부-7067
결재일자	2016.4.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		진재섭	04/11 김영수
협조

교통시설물 설치 검토보고

(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

2016. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

교통시설물 설치 검토보고

(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

유관기관에서 설치요청한 교통시설물(cctv 및 과속단속카메라)에 대한 설치 계획을 검토보고 드림.

공사현황

○ 사 업 명 : 남부순환로~오정대로간(봉오대로 삼거리간) 도로개설공사

○ 위    치 : 강서구 방화대로 ~ 부천시 오정구 봉오대로 삼거리

○ 규    모 : 도로개설 40m(8차로), 연장 1.23km (부천시 270m)

○ 기    간 : 2010. 9.29. ~ 2016. 6.30. (총차)

○ 사 업 비 : 82,700백만원

○ 시 공 사 : 보훈종합건설(주), 감리사  ㈜수성엔지니어링

○ 공 정 율 : 84%, 도로 포장중

실정보고

○ 유관기관 교통시설물 설치요청 사항 반영

1) 과속신호단속카메라 설치

- 강서경찰서에서 과속에 따른 인명피해 최소화대책으로 설치요청한              과속단속카메라 2개소(시점부, STA.0+960) 설치 필요

2) 부천시 구간 교통CCTV 철거 및 재설치

- 공사구간내 저촉되어 이전이 불가피한 교통CCTV에 대하여 부천시             시설관리 공단 협의사항 반영 필요 (철거후 재설치 2개소)

○ 물량 검토

구 분	규 격	단위	당초	변경	증.△감	비고
6. 부 대 공
6.37. 교통단속장비설치	신호, 과속	개소	-	1	1
6.38. 교통단속장비설치	과속	개소	-	1	1
6.39. CCTV 이설	교통상황감시용
기존CCTV 철거	H=26m	개소	-	1	1
CCTV 설치	H=15m	개소	-	1	1
CCTV 설치	H=18m	개소	-	1	1
CCTV자가통신망구축		식	-	1	1
6.40. 웹카메라 설치		개소	-	1	1
<제경비 제외공사>
검사수수료	신호, 과속	식	-	1	1
검사수수료	과속	식	-	1	1

○ 사업비 검토                                             (단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증.△감	비 고
교통단속장비설치(신호,과속)	-	49,295	49,295
교통단속장비 설치(과속)	-	43,665	43,665
CCTV 이설	-	111,614	111,614
웹카메라 설치	-	9,275	9,275
직 접 공 사 비	-	213,849	213,849
간 접 공 사 비	-	58,370	58,370
제경비 제외공사	-	14,145	14,145
공 급 가 액	-	286,364	286,364
부 가 가 치 세	-	28,636	28,636
도 급 액	-	315,000	315,000
관 급 자 재 비	-	-	-
총 공 사 비	-	315,000	315,000

○ 신규단가적용 검토 :  강제협의율(92.75%) 적용

- 지방자치단체 공사계약일반조건. Ⅶ.계약금액의 조정.1-나항의 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우"에 해당되는 설계변경으로 시공사와 강제협의율(92.75%) 적용 협의완료

검토결과

○ 유관기관 요청사항과 협의결과를 반영하여 교통시설물(CCTV 및 과속단속 카메라) 설치를 검토한 책임건설사업관리기술자 실정보고가 타당함으로 승인코자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.