문서번호	토목부-7015
결재일자	2016.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	04/11 김영수
협조

전자도면 작성 표준화 비용 반영 검토보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

2016. 4.

도시기반시설본부

(토목부)

전자도면 작성 표준화 비용 반영 검토보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

전자설계도서 작성·납품지침에 의거 전자도면 작성 표준화 비용 반영에 대한 검토보고임

1		관련근거

❍ 전자설계도서 작성·납품지침(200706. 건설교통부)

❍ 시설물정보관리종합시스템 및 시설물재난관리스시템 운영규정

❍ 한종(서빙고)제16-031호(2016. 4. 11.) 실정보고

2		공사개요

❍ 위    치 : 용산구 보광동 ~ 주성동(두무개길 ~ 강변북로)

❍ 규    모

- 기존고가 철가 : B=16m, L=510m

- 고가설치 : B=6.4, L=115m / B=10.4, L=290m

❍ 공사기간 : 총괄 2011. 1. 6. ∼ 2016. 4.30.(5차 2015. 3. 2. ~ 2016. 4.30.)

❍ 도 급 비 : 총괄 20,882백만원(5차 8,270백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1

❍ 시 공 사 : 주식회사 흥화 외 1

3		감리단 보고내용

❍ 반영사유

- 본공사 준공후 한국시설안전공단에 도면 제출시 필요한 도면정보 교환표준화 작업에 소요되는 비용 반영이 필요함

❍ 검토내용

1) 도면표준화 대상 구조물 현황

- 구조형식 및 규모

구 간	구조형식		규 모		비 고
	상부	하부(교각)	연장(m)	폭원(m)
서빙고로	ST. BOX Girder	T형	290 (45+4@50+45)	10.40 (왕복 2차로)
강변북로			115 (35+45+35)	6.40 (1차로)

※ 서빙고고가교는 1종 시설물로 한국시설안전공단에 제출하여야 함.

- 작성 설계도면

· 위치도(또는 배치도), 평면도, 단면도(종․횡),상부․하부 구조물도, 빔상세도,   신축이음장치․교좌장치 상세도 등

2) 시행근거 검토

- 건설분야 도면정보 교환표준(KOSDIC)(2011.4, 한국건설기술연구원)은   “건설기술개발및관리에관한운영규정(2004.5.19.)”에 의거 개발된 건설

CALS/EC 단체표준으로, 건설기술진흥법 제18조에 의거 시행하여야 함

3) 도면수량

공 종		규격	매수	비 고
1.공 통		A3	10
2.토 공		A3	14
3.배수공		A3	-
4.구조물공	상부(두무개길)	A3	119
	상부(강변북로)	A3	70
	하부공	A3	44
	옹벽공	A3	12
	기존교량보수․보강	A3	-
5.포장공		A3	-
7.부대공	도로분야	A3
	구조물분야	A3	4
합 계			잘못된 계산식

❍ 적용단가 검토 및 공사비 증·감 현황

- 적용단가 검토

· 견적가에 낙찰율(81.57%) 적용

- 공사비 증·감 현황                                       (단위 : 천원)

공 종 명	수량	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
1. 전자도면 작성 표준화	1	식	-	6,400	6,400
직접공사비			-	6,400	6,400
부가가치세		식	-	640	640
도 급 금 액			-	7,040	7,040

4		조치계획

❍ 관련규정에 의거 감리단에서 검토한 도면정보 표준화 작업에 소요되는 비용 반영 검토내용이 적정함으로 승인하고 향후 설계변경시 반영하고자 함

붙  임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.