문서번호	토목부-7014
결재일자	2016.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	04/11 김영수
협조

강변북로(일산방향) 접속부 구조물 복구등 검토보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

2016. 4.

도시기반시설본부

(토목부)

강변북로(일산방향) 접속부 구조물 복구등 검토보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

‘15년 10월 31일 임시 개통시 경원선 횡단 가설교량 저촉으로 강변북로 측면부로 임시 개통한 구간에 대한 구조물 복구등에 대한 검토보고임

1		관련근거

❍ 한종(서빙고)제16-030호(2016. 4. 11.) 실정보고

2		공사개요

❍ 위    치 : 용산구 보광동 ~ 주성동(두무개길 ~ 강변북로)

❍ 규    모

- 기존고가 철가 : B=16m, L=510m

- 고가설치 : B=6.4, L=115m / B=10.4, L=290m

❍ 공사기간 : 총괄 2011. 1. 6. ∼ 2016. 4.30.(5차 2015. 3. 2. ~ 2016. 4.30.)

❍ 도 급 비 : 총괄 20,882백만원(5차 8,270백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1

❍ 시 공 사 : 주식회사 흥화 외 1

3		감리단 보고내용

❍ 검토목적

- 임시개통시 전면부 임시 가설교량이 접촉되어 강변북로 측면부로 개통하였던 구간에 대하여 가설교량 철거가 완료되어 구조물 복구 및 추가 아스팔트포장등에 대한 적정성 검토임

❍ 검토내용

1) 강변북로 접속부 임시도로 복구등

- 현 황

· 임시개통시 강변북로 측면부 접속으로 기존 도로시설물 철거에 따른 원상복구 및 임시 접속도로 철거와 추가적인 교통안전시설물 설치가 필요함

- 철거 및 복구수량

구 분	규 격	수 량	비고
아스콘 깨기	t30㎝이하	58㎡
가드레일	SB-2	94m
콘크리트 경계블록	180×205×1,000	38m
L형측구	200×500(25-21-80)	38m
차선규제봉	750×200×80	32EA
앵커설치	D19㎜	400개소

2) 접속부 배수시설 설치

- 현 황

· 기존 강변북로의 빗물받이 위치가 향후 도로로 사용됨에 따라 주행차로의 완전을 확보하기 위해 이설이 필요함

- 설치계획

· 강변북로상의 빗물받이(3개소)에 덮개를 설치하고 우측 옹벽부에 횡 배수관              (D300mm) 및 빗물받치 신설

· 설치수량

구 분	규 격	수 량	비고
횡배수관 설치	D300	L=17.5m
빗물받이 설치	700×800×1,050	3개소
집수정덮개 설치	1400×1400	3개소

- 평면도

3) 동빙고다리(U턴고가) 하부 아스팔트 추가포장등

- 현 황

· 강변북로(일산방향) 접속부 기존 도로 재포장 및 도색

※ 차로구획 조정으로 인한 기존 안전지대에 설치되어 있던 시선유도봉  철거자리 훼손 및 공사 차량진입으로 인한 파손등으로 재포장 필요

· 서빙고고가교에서 강변북로로 진입시 U턴 고가 강변북로 진입부 구간까지 강변북로 본선부로 합류하는 테이퍼구간으로 차량운전자 전방 시인성 확보를 위해 교통안전시설(차선규제봉 및 갈매기 표지판) 설치 필요

- 포장 및 교통안전시설물 설치수량

구 분	규 격	수 량	비고
절삭후 아스팔트 덧씌우기	표층(#78)	1,182㎡
차선규제봉	750×200×80	35EA
갈매기 표지판	쏠라형	3EA
차선제거	건식흡입 수동식	740m
차선도색	고휘도	1,849m

❍ 적용단가 검토 및 공사비 증·감 현황

- 적용단가 검토

· 기존공종 : 기존단가 적용

· 신규공종 : 낙찰율(81.57%) 적용

- 주요 공사비 증·감 현황

공 종	단 위	수 량	금 액			비고
			당초(천원)	변경(천원)	증·감(천원)
토공	식	1		2,566
2. 배수공	식	1		825
3. 포장	식	1		1,661
4. 부대공	식	1		22,349
직접공사비				27,401	27,401
제경비				9,855	9,855
공급가액				37,286	37,286
부가가치세				3,729	3,729
도급금액				41,015	41,015
관급자재				7,957	7,957
폐기물 처리비				5,203	5,203
총공사비				54,175	54,175

4		조치계획

❍ 임시개통시 철거한 기존 구조물 복구 및 임시 진입도로 철거, 추가 시설물 설치등에 대한 감리단의 검토내용이 적정함으로 승인하고 향후설계변경시 반영하고자 함

※ 기존 시설물 복구 및 정비에 필요한 관급자재 구매와 임시도로 철거 및 아스팔트 파쇄에 따른 폐기물에 대한 설계변경은 별도 시행

붙  임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.