문서번호	토목부-7154
결재일자	2016.4.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
한병찬		진재섭	04/12 김영수
협조

건설폐기물처리용역 준공기한 연기 검토보고

- ‘율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사’ 건설폐기물 처리용역(3차) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

건설폐기물처리용역 준공기한 연기 검토보고

≪ ‘율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사’ 건설폐기물 처리용역(3차) ≫

책임감리원으로부터 ‘율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사’ 건설폐기물 처리용역(3차) 계약기간(준공 연기)변경 요청이 있어 검토 보고드림.

※ 율곡감 2016 - 76호(2016.4.11.) : 건설폐기물처리용역 기간 연장 검토보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사 건설폐기물 처리용역(3차)

○ 계약기간 : ’15.2.1. ∼ ’16.4.30. (전체 ’11.3.23.∼ ’17.12.31.)

○ 계약금액 : 218,890천원  (전체 483,390천원)

○ 계 약 자 : ㈜장형기업 대표 김봉숙

□ 준공기한 변경(감리단 보고)

○ 준공기한 연기 : 2016. 4.30. → 2016.12.31.(증 8개월)

※ 계약금액 : 변경없음

○ 연기사유 : 토목공사 기간 연장에 따른 폐기물처리용역 준공기간 연장

○ 검토의견 : 토목공사 기간 연장에 따른 폐기물처리용역 준공기간 연장건으로 공사 추진에 차질이 없도록 준공기한 연기하는 것이 타당함.

□ 조치의견

○ 상기 감리단 보고내용과 같이 공사 추진에 차질이 없도록 건설폐기물처리용역(3차) 준공기한을 연기코자 함.

‣ 준공기한 연기 : 2016.4.30.→ 2016.12.31.(증 8개월)

붙  임 : 감리 검토의견서 및 관련공문 각 1 부.