문서번호	원수관리과-847
결재일자	2016.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	원수관리과장	강북아리수정수센터소장
봉선필	손주옥	04/12 박기석
협 조
	주무관		김효준

강북계열 고효율 취수펌프 제작설치 계획

2016. 4.

강북계열 고효율 취수펌프 제작설치 계획

금년 강북계열 고효율 취수펌프 교체사업에 대해 안정적인 취수펌프 운영을 위해 장래분 위치(3호,8호)에 펌프를 설치하고자 함

Ⅰ		사업근거 및 기추진실적

취수펌프 년차별 개량추진(기술진단과-100973:`11.12.29)

펌프개량 추진실적

- 2014년 : 주펌프720kW × 2대

- 2015년 : 주펌프720kW × 1대

Ⅱ		현 황

강북계열 취수펌프 시설현황

도수관	A 열						B 열
펌 프	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호	9호	10호	11호
용량(kW)	720		장래분	720		375	720	장래분	375	720
유량 (㎥/hr)	7,320			7,320		3,660	7,320		3,660	7,320
설치년도	`97			`15	`97		`14		`97	`14	`97
흡수정	1흡수정			2흡수정			3흡수정			4흡수정

현 황 사 진

Ⅲ		사 업 개 요

사업기간 : 2016. 4. ~ 10.

규   모

- 취수펌프 2대(720kW×1대, 375kW×1대) 제작설치

- 주변기기 설치 1식

- 전기․통신공사 1식

계약방법 : 종합낙찰제

납품조건 : 펌프효율 86%이상

사 업 비 : 680,000천원(전기통신사업비 포함)

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비

기타사항

- 모타펌프 제작설치는 본청에 경쟁입찰 의뢰하고

- 밸브 등 조달3자단가 품목은 호환성 등 유지관리를 위해 기 설치된 제품과 동일 제품 구매

- 주변기기 설치공사는 경쟁입찰

- 전기통신공사 별도발주

Ⅳ		추 진 일 정

모타펌프

- 2016. 4. 12. ~ 4. 30. : 본부 기술심사 및 본청 계약심사

- 2016. 5. 01. ~ 5. 10. : 사업발주

- 2016. 5. 20. ~ 10. 31. : 사업시행

조달3자단가 품목구매 : 2016. 5. ~ 7.

주변기기 설치 : 2016. 7. ~ 9. 끝.