투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시인재개발원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	인재개발원 테니스장 개보수공사 관급자재 납품기한 연장

우리 원 테니스장 개보수공사와 관련 소요되는 관급자재를 아래와 같이 납품기한을 연장하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

1. 관급자재 납품기한 연장 사유 : 조경공사 공정진행에 따른 순연

2. 납품기한 연장 내역

관급자재	구매방법	당초 납품기한	변경 납품기한	비고
앙투카	수의구매	2016. 4. 17	2016. 5. 15
인조잔디	입찰구매	2016. 5. 4	2016. 5. 20
메쉬휀스	조달구매	2016. 5. 7	2016. 5. 26

3. 기타 측구수로관 등 3종은 당초 납품기한(2016.4.17.)내 납품완료예정임. 끝.

주무관	오동열		시설재무팀장	박계완		인재기획과장	전결 04/12 원권식
협조자
시행	인재기획과-4965	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 58	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화	3488-2054	/전송	3488-2346	/	maldoogi@seoul.go.kr	/	대시민공개