문서번호	시설보수과-1487
결재일자	2016.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡	代안봉용	04/12 이성재

소화조 정밀점검 및 실시설계 용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.04.

중랑물재생센터

(시설보수과)

소화조 정밀점검 및 실시설계 용역 시행계획

노후화(콘크리트 열화, 탈락 등)된 소화조 보수를 위한 안전점검 및 실시 설계를 시행, 보수•보강하고 향후 원만한 기능유지를 위한 유지관리계획 수립이 필요하여 용역을 시행하고자 함.

1		추진배경

□ 노후화된 소화조의 물리적, 기능적, 구조적 안정성 및 결함의 원인 등을 조사      측정하고, 보수•보강 등 방법을 제시, 신속하고 적절한 조치를 취하여 원만한      기능유지를 하고자 실시설계 용역을 추진코자 함

2		용역개요

□ 용 역 명 : 중랑물재생센터내 소화조 정밀점검 및 실시설계용역

□ 용역개요 : 소화조 2지(1지당 3,630㎥, B=23m, H=13m)

□ 용역기간 : 착수일로부터 60일

□ 소요예산 : 26,400천원(공사비요율에 따른 직선보간법에 의거 산출)

3		용역 추진방향

□ 노후화된 소화조를 정밀점검하여 적정한 보수•보강 공법 선정

□ 원만한 기능유지를 위한 유지관리계획 수립

4		세부 추진일정

□ 2015.04. : 기술용역 타당성 심사요청 및 용역계약

□ 2015.05. : 계약심사 의뢰 및 발주

□ 2015.06. : 용역준공 및 공사착공

□ 2015.11. : 공사준공

붙임 : 1. 용역설계서 1부.

2. 위치도 1부. 끝.