문서번호	건축부-4686
결재일자	2016.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축관리과장	건축부장
김연석	곽동호	전결 04/12 안재혁

구리암사대교 도로관리시설 초소

실정보고에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  4

건축부

구리암사대교 도로관리시설 초소

실정보고에 대한 검토 보고

『구리암사대교 도로관리시설 초소 신축공사 』관련, 책임감리원으로부터 제출된 실정보고에 대한 검토 보고

1. 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 도로관리시설 초소

○ 대지위치 : 구리시 아천동 53-2외2필지

○ 규    모 : 지하0층/지상3층, 연면적 816.07㎡

○ 용    도 : 근린생활시설

○ 공사기간 : 2016.3.~2016.8.31.

○ 총공사비 : 1,910백만원(건축 902백만원)

○ 시 공 자 : 현대건설

○ 감 리 사 : 도화엔지니어링

2. 추진경위

○ 2016.03. : 공사착공

○ 2016.04. : 기초 공사

○ 2016. 04. 14 : 공사장 진출입차량의 안전을 위한 휀스 및 출입문                         설치 실정 보고

3. 실정보고

□ 주요내용 및 검토현황

연번	주 요 내 용	검 토 현 황	비 고
1	차량통행의 안전관리를 위하여 휀스 및 차랑 진출입문 설치	공사 작업장과 차량통행로 휀스설치 차량 진출입위한 홀당도어 설치 공사차량과 램프 이용 차량 안전을 위한 도로 반사경설치	설계변경 가능

□ 공사비 증가 내용

연번	주 요 내 용	당 초	변 경	증 감	비 고
1	EGI 휀스	698,565	0	698,565
2	홀딩도어	3,083,544	0	3,083,544
3	도로반사경 설치	184,065	0	184,065
합 계		3.966,174	0	3,966,174

4. 책임감리자 검토의견

○ 시공사 실정보고사항을 검토한 결과 공사장 안전과 운행차량의 안전과

운행차량의 안전을 위하여 훼스 및  홀딩도아 ,반사경을 설치 함이 타당함

5. 처리의견

○ 암사대교 도로관리시설 초소 제잡비,부가가치세를 포함하여 공사비

금4,838,000원 증액이 수반되어 설계변경 요구하는 실정보고임

○ 책임감리자의 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 실정보고를 승인처리하고,       사업추진 관련부서(토목부)에 실정보고 승인사항을 통보하고자 함.

붙임 : 실정보고 관련서류 각 1부.  끝