문서번호	소방행정과-4461
결재일자	2016.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
김기범	이순호	손문종		04/12 이영우
협 조

- 소방공무원 정신건강 관리를 위한 - 강동소방서 심신안정실 공사 설계 발주 계획

2016. 4.

강동소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 소방공무원 정신건강 관리를 위한 -

강동소방서 심신안정실 공사 설계 발주 계획

충격적인 사고현장에 상시 노출 되는 소방공무원의 외상 후 스트레스 치료 및 안락한 휴게 공간마련을 위한 공사 설계 발주 계획 임.

□ 관련근거

○ 강동 소방행정과-3593호(2016.3.24.)“강동소방서 심신안정실 설치 계획”

○ 기술심사담당관-5879호(2016.3.30.)“제651차 기술용역 타당성심사 결과 통보”

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 강동소방서 심신안정실 설치 공사 설계용역

○ 대    상 : 강동소방서(4/1층,  대지면적 : 4,232.3㎡ / 연면적 : 3,868.5㎡)

○ 용역기간 : 2016. 4. 18. ~ 5. 2. (15일간)

○ 공 사 비 : 40,000천원(설계비 포함)

○ 설 계 비 : 2,165천원

○ 주요 과업내용

- 강동소방서 심신안정실 등 설계도서 작성

- 설계도면, 내역서(원가계산서), 시방서(과업지침서)작성

- 공사 수량 산출 및 공사비 내역서 작성

□ 계약추진

○ 계약방법 : 수의계약

○ 설계용역 수의계약 사유

- 안락하고 편안한 심실안정실 구현을 위한 세부적 과업지시가 곤란하여 입찰에 의한 계약상대자 선정시 성과물 작성 등에 어려움이 있음

○ 추진기간

- 설계용역계약 : 2016. 4. 15.

- 설계용역착수 : 2016. 4. 18. ~ 5. 2.(15일간)

- 용역준공검사 : 2016. 5.  3. ~ 5. 9.(7일간)

□ 향후추진계획

○ 공사입찰 : 2016. 5. 11. ~ 5. 16. (5일간)

○ 공사계약 : 2016. 5. 17 ~  5. 18. (2일간)

○ 공사기간 : 2016. 5. 20. ~ 6.  8. (20일간)

□ 기대효과

○ 외상사건 노출직원 등 발생 시 초기 스트레스 해소를 통한 스트레스 이완

○ 몸과 마음을 치유하는 힐링공간 마련을 통한 직원 사기진작 기여

붙임 : 1. 제651차 기술용역 타당성 심사결과 1부.

2. 강동소방서 심실안정실 설치 공사 계획 1부.

3. 설계용역 과업지서 1부

4. 강동소방서 사무공간 재배치 평면도 1부.  끝.