문서번호	청소년담당관-7123
결재일자	2016.4.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		청소년시설팀장	청소년담당관
윤재호		최형대	04/12 박대민
협 조

성북구 청소년문화의집 건립 지원

예산교부 계획

2016 . 4.

평생교육정챙관

청소년담당관

성북구 청소년문화의집 건립 지원 예산교부 계획

지역 내 청소년의 건전한 여가 활동 활성화 및 교육·정보 제공을 위한 청소년수련시설 확충

□ 사업근거

○  청소년활동 진흥법 제11조 제3항(수련시설의 설치·운영 등)

○ 아동청소년담당관-26929호(2014.12.2.) 성북구 정릉청소년문화의집 건립 계획

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 성북구 청소년문화의집 건립

○ 위    치 : 성북구 정릉동 1032-2, 3번지

○ 사업기간 : 2014. 8. ~ 2017. 6.

○ 총사업비 : 3,986백만원(국비 1,050 시비 1,510 구비 1,426)

○ 사업규모 : 부지면적 1,527㎡, 연면적 1,450㎡(지하 1층 ~ 지상 2층)

○ 주요시설 : 음악연습실, 체력단련실, 동아리실, 청소년카페 등

□ 사업예산

(단위 : 천원)

연도	합계	국비	시비	구비
총사업비	3,986,199	1,050,000	1,510,000	1,426,199
2016	3,666,199	1,014,000	1,426,000	1,226,199
2015	320,000	36,000	84,000	200,000
2014	-	-	-	-

○ 예산과목 : 평생교육정책관 청소년담당관, 건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진, 청소년시설 확충 및 운영개선 추진, 성북구 청소년문화의집 건립 지원, 자치단체자본보조(100-403-01)

□ 세부사업일정

일 정	세부추진 내용
2014. 8.	기본사업계획 수립
2016. 1.	기본설계 완료
2016. 2.	실시설계 완료
2016. 4.	착공 예정
2017. 5.	준공 예정
2017. 6.	개관 예정

□ 향후계획

○ 16. 4. 성북구 청소년문화의집 건립 지원 예산교부(市→성북구)

○ 16. 4. 시설 건립 공사 착공

○ 17. 1. 2016년 사업결과 및 정산보고

※ 공사일정에 따라 계획이 변동 될 수 있음.

붙임 : 1. 성북구 청소년문화의집 건립지원 예산교부 계획 1부.

2. 사업계획서 및 보조금 교부신청서 1부.

3. 성북구 정릉문화의집 건립 증빙자료 각 1부.

4. 성북구 정릉청소년문화의집 건립 계획(아동청소년담당관) 1부.

5. 성북구 정릉청소년문화의집 건립 기본계획(구청장방침) 1부.  끝.